문서번호	도시철도토목부-13920
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	11/28 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

기존5호선 통신선로 이설 관련 현장 실정보고 검토

2018. 11.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

기존5호선 통신선로 이설 관련 현장 실정보고 검토

시점부 기존5호선 연결구간 벽체 철거에 따른 통신선로 이설 관련 실정보고에 대하여 검토 보고함

1		공사개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

□ 규    모 : 총연장 L=628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

□ 기    간 : `15.03.30. ~ `20.12.31.

□ 도 급 액 : 76,887백만원

□ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사

□ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

□ `17.09.26 : 기존벽체 철거전 침수방지대책 수립 요구(서울교통공사 ⇒ 본부)

⇒ 정거장, 환기구 등 구조물을 지상부까지 시공완료 후 기존벽체 철거

□ `17.09.27 : 지장물 이설 관련 현장조사 및 회의(본부, 서울교통공사, 현장)

⇒ 설계업무지원(도철설비부), 기술업무지원(서울교통공사), 공사 및 감리(도철토목부)

□ `17.12.18 : 실시설계 성과물 제출(도시철도설비부 ⇒ 도시철도토목부)

□ `18.02.06 : 시스템 분야별 공사에 포함 시행 요청(도시철도토목부 ⇒ 도시철도설비부)

⇒ 시스템 공사에 포함 시행 불가 회신

□ `18.04.20 : 지장선로 이설계획 검토(도시철도토목부)

□ `18.06.18 : 지장선로 이설 설계서 검토결과 제출(서울교통공사 ⇒ 본부)

□ `18.07.09 : 지장물(통신) 이설 관련 실정보고(건설사업관리단 ⇒ 본부)

□ `18.07.18 : 검토결과 제출(도시철도설비부 ⇒ 도시철도토목부)

3		건설사업관리단 보고내용

□ 변경현황

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
케이블 트레이 신설(터널,심야)	W200*H100(사다리형)	m	80	135	증55
파스콘 트로프	(당초) FRP DUCT(W150*H70*L1000)	m	20	-	감20
	(변경) FRP DUCT(W150*H70*L500)	m	-	40	증40
광케이블 철거(터널,심야)	OF-SM-36CORE(난연)	m	-	2,590	증2,590
광케이블 철거(터널,심야)	OF-SM-12CORE(난연)	m	-	5,180	증5,180
케이블 트레이 철거(터널,심야)	W200*H100(사다리형)	m	-	300	증300

□ 변경내용

○ 통신선로 이설위치 변경

- 위치변경 : (당초)중앙기둥 ⇒ (변경) 상선 기존 벽체

- 사    유 : 서울교통공사 협의결과 반영

벽체철거

건축한계

건축한계

하 선

200

200

상 선

당 초

변 경

○ 케이블 부설자재 수량 및 규격 변경

- 케이블 트레이

· 수량변경 : (당초)80m ⇒ (변경)135m [증]55m]

· 사    유 : 서울교통공사 협의결과 반영(철거부분과 이격)

- 파스톤 트로프

· 수량변경 : (당초)20m ⇒ (변경)40m [증]20m]

· 사    유 : 설치 수량 정산

· 규격변경 : (당초)L1000 ⇒ (변경)L500

· 사    유 : 서울교통공사 협의결과 반영

당초	80m 15m 5m
변경	135m 25m 15m

○ 기존 케이블 및 트레이 철거 반영

- 케이블 철거(L=7,770m), 트레이 철거(L=300m)

□ 공사비 증·감

[단위 : 천원]

구 분	규 격	당 초	변 경	증·감
1. 케이블 트레이 신설	W200*H100 (사다리형,터널,심야)	7,361	12,422	증5,061
2. 파스콘 트로프	(당초) FRP DUCT (W150*H70*L1000)	1,248	-	감1,248
	(변경) FRP DUCT (W150*H70*L500)	-	1,935	증1,935
3. 광케이블 철거	OF-SM-36CORE (난연,터널,심야)	-	12,126	증12,126
4. 광케이블 철거	OF-SM-12CORE (난연,터널,심야)	-	24,253	증24,253
5. 케이블 트레이 철거	W200*H100 (사다리형,터널,심야)	-	12,227	증12,227
6. 광케이블 신설	OF-SM-36CORE OF-SM-12CORE (난연,터널,심야)	94,367	94,367	-
7. 광케이블 성단	13-71CORE, 12CORE 이하	6,871	6,871	-
8. 광케이블 시험		11,291	11,291	-
9. 통신케이블 포설	CPEV-SB 0.9/10P(터널,심야)	5,245	5,245	-
10. 케이블국내성단		709	709	-
11. 케이블 트레이 부속품		90	90	-
12. 연선전화기 이설	터널용	691	691	-
13. 후강전선관 설치	28C, 터널	124	124	-
14. OFD 신설	48CORE, 12CORE	905	905	-
15. 통신케이블 신설	UTP CAT .5E 4P	375	375	-
16. 통신케이블성단	UTP CAT .5E 4P	25	25	-
계		129,302	183,656	증54,354
제경비		36,180	53,041	증16,861
일반관리비, 이윤 등		22,918	33,703	증10,785
도 급 금 액		188,400	270,400	증82,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 기존5호선 통신케이블 이설에 대한 수량 및 공사비 검토결과 적정한 것으로 판단되며, 변경된 공사비(증82,000천원)는 추후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

4		조치의견

□ 상기 실정보고는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 추후 설계변경시  정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 공사비 증액 : 82,000천원

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 1부. 끝.