문서번호	도시철도토목부-14698
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/18 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 변경 검토(총괄5회, 4차1회, 5차1회)

2018. 12.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 변경 검토(총괄5회, 4차1회, 5차1회)

『하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사』관련 건설사업관리단으로부터 제출된 계약금액 변경(총괄5회, 4차1회, 5차1회)에 대한 검토 보고임.

○ 총괄 5회 : (당초)77,377백만원 ⇒ (변경)82,759백만원 [증5,382백만원]

○ 4 차 1회 : 계약금액 변경없음    ○ 5 차 1회 : 계약금액 변경없음

※ 관련문서 : 동일(철도감) 제18-3487호(2018.12.14.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.03.30.~2020.12.31.

○ 계약금액 : 76,887백만원

○ 계 약 자 : 한신공영(주) 외 1개사 / 감리사 : (주)동일기술공사 외 5개사

○ 계약현황

[단위 : 백만원]

구 분	총 괄	1∼3차 (준공)	금 회		향 후
			4차	5차
계약금액	76,887	31,177	16,137	2,500	27,073
공사기간	`15.03.30 ~`20.12.31	`15.03.30 ~`17.12.31	`18.01.22 ~`18.12.30	`18.10.04 ~`19.01.03	-

2		설계변경 현황

○ 계약금액 조정현황

[단위 : 백만원]

구 분	총괄 5회		증 · 감	4차 1회		5차 1회		증 · 감
	당 초	변 경		당 초	변 경	당 초	변 경
총 공사비	82,759	89,060	(증)6,301	17,812	17,812	2,500	2,500	-
도급공사비	76,887	83,054	(증)6,167	16,137	16,137	2,500	2,500	-
관급자재비	5,872	6,006	(증)134	1,675	1,675	-	-	-

○ 수량 및 공사비 증·감

〔 총괄 5회 〕

- 주요 수량 증·감 내용

구 분	변 경 내 용	금액(백만원)	비 고
가 설 공	· 도시가스침하봉 (증 7개소), 교통정리인 (증 1,518인)	증 192
본선1구간	· 천공 및 항타 (주간) → (주야간) · 지점영구앵커 (46공) → 마이크로파일 (47공) · 어스앵커 (55공) → (110공)	증 279
본선2구간	· 천공 및 항타 (주간) → (주야간) · S/P박기 (7,284m) → (5,105m) · 가벽철거 (콘크리트깨기 91㎥) → (D.W.S절단 200㎡)	증 285
본선 터널	· 숏크리트 타설 (1,387㎥) → (1,273㎥) · 터널바닥 인버트콘크리트 타설 (증 228㎥)	감 9
개착정거장	· 잔토처리 거리 변경 (25.04㎞~40.38㎞)	증 69
비개착정거장	· 영구버팀보 계측기설치 (증 26개소)	증 26
본선환기구#2	· 복공판 설치 (945㎡) → (1,001㎡)	증 5
고덕 천교	· 강관말뚝박기 (1,271m) → 강관말뚝박기 (640m), 마이크로파일 (945m) · PC BOX (116m) → RC BOX (35.5m)	증 190
도 급 자 지장물이설비	· 기존5호선 지장물 이설(전기, 신호, 통신)	증 1,766
제경비		증 1,183
제 요 율 적용제외	외부출입구 변경설계, 1구간 구조물 변경설계 외	증 501
물가 변동	물가변동(E/S) 3회	증 1,680
계		증 6,167

- 사  유 : 설계변경에 의한 수량변경 반영

〔 4차 1회 〕

- 주요 수량 증·감 내용

구 분	변 경 내 용	금액(백만원)	비 고
가 설 공	· 터널방음시설 (2개소) → (1개소)	감 68
본선1구간	· 토공굴착 (3,508㎥) → (0㎥) · 잔토처리 (2,054㎥) → (0㎥) · 띠장철거 (290m) → (1,746m) · 어스앵커 (55공) → (110공) · 콘크리트 타설 (4,904㎥) → (5,105㎥) · 기존선 벽체 철거 (265㎡) → (0㎡)	감 112
본선2구간	· 띠장철거 (639m) → (1,066m) · 버팀보 철거 (41본) → (160본) · 가벽 콘크리트 절단 (증 2개소)	증 437
본선 터널	· 터널굴착 및 잔토처리 (4,088㎥) → (2,296㎥)	감 256
개착정거장	· 콘크리트 타설 (11,424㎥) → (10,574㎥) · 거푸집 설치 (21,599㎡) → (17,194㎡)	감 168
비개착정거장	· GPR탐사 및 시설물 상태 조사 (증 1회)	증 51
본선환기구#1	· 토공굴착 및 잔토처리 (3,966㎥) → (692㎥) · 콘크리트 타설 (1,293㎥) → (851㎥)	감 142
본선환기구#2	· 되메우기 (1,541㎥) → (576㎥) · 중앙말뚝개구부 마감 (증 28개소)	감 16
차량기지 입출고선	· 콘크리트 타설 (405㎥) → (205㎥) · 거푸집 설치 (606㎡) → (302㎡)	감 30
고덕 천교	· 거푸집 설치 (1,836㎡) → (619㎡) · 마이크로파일 (증 330m)	감 89
전기,설비 공사	· 본선 터널 임시 전기, 환기 설비	감 35
제경비		증 76
제 요 율 적용제외	암매각 외	증 12
물가 변동	물가변동(E/S)	증 341
계		0

- 사유 : 설계변경에 의한 수량변경 및 차수 간 물량 조정

〔 5차 1회 〕

- 주요 수량 증·감 내용

구 분	변 경 내 용	금액(백만원)	비 고
가 설 공	· 부지임대료 외	증 11
본선1구간	· 토공굴착 (6,587㎥) → (0㎥) · 버팀보 설치.철거 외 (70본) → (0본) · 구보물 개구부 마감 (56개소) → (0개소) · 품질시험비, 계측 등 (감)	감 245
본선2구간	· 토공굴착 (4,018㎥) → (0㎥) · 버팀보 설치.철거 외 (40본) → (0본) · 가벽 철거 (0㎡) → (200㎡)	증 50
개착정거장	· 되메우기 (1,000㎥) → (200㎥) · 버팀보 설치.철거 외 (653본) → (0본)	감 181
비개착정거장	· GPR탐사 및 시설물 상태 조사 (감 1회)	감 27
본선환기구#1	· 토공 및 채움콘크리트 (181㎥) → (0㎥) · 버팀보 설치.철거 외 (247본) → (0본) · 콘크리트 타설 (1,294㎥) → (592㎥)	감 395
본선환기구#2	· 되메우기 (757㎥) → (0㎥) · 버팀보 설치.철거 외 (180본) → (0본) · 지장물 복구 (156m) → (0m)	감 85
차량기지 입출고선	· 콘크리트 타설 (0㎥) → (200㎥)	증 24
고덕 천교	· 교량배수시설 (감 1식)	감 18
도 급 자 지장물이설비	· 기존5호선 지장물 이설	증 855
전기,설비 공사	· 본선 터널 임시 전기, 환기 설비	증 36
제경비		감 30
제 요 율 적용제외	암매각 외	증 44
물가 변동	물가변동(E/S)	감 39
계		0

- 사유 : 설계변경에 의한 수량변경 및 차수 간 물량 조정

3		건설사업관리단 검토의견

○ 유관기관 요구, 물가변동 등 총괄5회 설계변경에 따른 계약금액 조정 (증6,301백만원)은 타당하다고 판단되며,

○ 4차1회, 5차1회 변경 설계내용은 총괄도급 물량범위내에서 금차분 예산범위에 맞게 공종간 연속성을 고려하여 물량 조정함이 타당한 것으로 판단됨.

- 설계변경 자문 (소)위원회 심의 완료 :`18.12.11.

4		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(총괄5회, 4차1회, 5차1회) 건에 대해서는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 계약금액 조정을 시행하여 공사진행에 만전을 기하고자 함.

- 공사비 변경

· 총     괄 : 증) 6,301백만원

· 4차, 5차 : 변경없음

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부.  끝.