문서번호	도시철도토목부-606
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	궤도과장	도시철도토목부장		도시철도국장
조규양	최진규	代윤방식		01/18 이진용
협 조	건축공사과장		이병희
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획(6차공사) 검토

2019. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획(6차공사) 검토

우리본부에서 시행하고 있는『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』6차분 발주계획에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.05.30.~2020.12.31.

○ 도 급 액 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		계약 및 발주현황

(단위 : 천원)

구 분		총 괄	기 준공 (1~5차)	금회 발주 (6차)	잔여분
공사비	계	89,149,800 (100%)	52,739,849 (59.16%)	19,013,400 (21.33%)	17,396,551 (19.51%)
	도급비	83,054,000	49,814,000	17,500,000	15,740,000
	관급비	6,095,800	2,925,849	1,513,400	1,656,551
공사기간		`15.05.30 ~`20.12.31	`15.05.30 ~`18.12.31	착공일 ~`20.01.31	-

3		발주(6차공사) 계획

○ 공사기간 : 착공일로부터 ‘20.01.31.까지

○ 발주금액 : 17,500백만원(도급비)

〈 공종별 발주금액 〉

(단위 : 백만원)

구 분	총괄금액	발 주 금 액			잔여분
		기 준공 (1~5차)	금회 발주 (6차)	소 계
1.토 목	52,853	36,492	9,891	46,383	6,470
1.1 가설공	2,057	1,314	550	1,864	193
1.2 본선	8,995	7,732	1,169	8,901	94
1.3 본선터널	4,515	3,760	4	3,764	751
1.4 정거장	27,173	18,518	4,492	23,010	4,163
1.5 본선환기구	4,146	2,711	1,283	3,994	152
1.6 차량기지 입출고선	111	105	1	106	5
1.7 고덕천교	2,568	1,121	1,124	2,245	323
1.8 도로복구공	369	13	178	191	178
1.9 조경공사	446	136	-	136	310
1.10 도급자 지장물이설비	2,473	1,081	1,092	2,173	300
2.건축	3,915	-	1,634	1,634	2,281
3.전기	50	50	-	50	-
4.설비	36	36	-	36	-
직접공사비 계	56,854	36,578	11,525	48,103	8,751
간접공사비	19,191	11,381	4,065	15,446	3,745
제요율제외 및 PS공종	1,916	184	559	743	1,173
물가변동(1회,2회,3회)	5,093	1,671	1,351	3,022	2,071
도 급 금 액	83,054	49,814	17,500	67,314	15,740
관 급 자 재	6,096	2,926	1,513	4,439	1,657
총 공 사 금 액	89,150	52,740	19,013	71,753	17,397

〈 6차 공사내용 〉

(단위 : 백만원)

구 분		공종 및 수량	금액	추진내용
토 목	가설공	교통정리원 : 1,518인 현장정리 및 청소 : 16,588㎡	550	품질관리활동 및 교통처리 안전시설 외
	본선개착	되메우기 및 다짐:15,701㎥ H-말뚝뽑기 : 4,630m	1,169	1,2구간 : 구조물 완료 및 되메우기 완료
	본선터널	열차중앙대피손잡이 10개소	4	열차중앙대비 손잡이 설치 완료
	정거장	되메우기 및 다짐:18,603㎥ 구조물 콘크리트타설:3,724㎥ 방수공 : 8,544㎡	2,102	개착정거장 : H-말뚝뽑기 완료 가시설해체, 되메우기 완료 비개착정거장 : H-말뚝뽑기 완료
	외부출입구	토공굴착 : 47,217㎥ 구조물 콘크리트타설:3,275㎥ 거푸집 설치 : 5,340㎡	2,390	외부출입구 #1,4 : 구조물 B1,2 완료 외부출입구 #3 : 토공 완료
	본선환기구	되메우기 및 다짐:8,990㎥ 구조물 콘크리트타설:1,725㎥	1,283	환기구#1,2 : 구조물 및 되메우기 완료
	입출고선	열차대피용 손잡이 4개소 스틸그레이팅 2개소	1	열차대피용 손잡이 및 스틸그레이팅 설치 완료
	고덕천교	콘크리트 타설 : 572㎥ 상부거더 및 제작 : 12본	1,123	좌측 : 가교철거 및 하부공사 우측 : 교통전환
	도로복구공	종배수관 부설 : 479m 아스콘포장 : 11,435㎡	178	본선1,2구간 도로복구 및 교통전환
	도급자 지장물이설	교통신호이설 및 가로등 이설 기존5호선 지장물 이설	1,092	교통전환에 따른 교통신호이설 설치 기존5호선 지장물 이설 완료
	건축공사	조적 및 석공사, 금속공사외	1,634	정거장 조적 및 석공사, 금속공사 외
직접공사비 계			11,526
제경비,제요율제외, 물가변동			5,974	제요율제외 및 간접노무비, 물가변동(1, 2, 3회)
도급금액			17,500
도급자설치 관급자재		레미콘 및 아스콘 외	1,513
총공사비			19,013

4		공사관련자 현황

구 분	소 속	직 명	성 명	비고
설 계 자	(주)동일기술공사	책임건설사업관리자	홍 춘 선
심 사 자	(주)신성엔지니어링	기술지원 건설사업관리기술자	남 기 천
확 인 자	(주)동일기술공사	대표이사	황 주 환
지원업무 수 행 자	도시기반시설본부	도시철도토목부 공사관리관	조 규 양	토목
		도시철도건축부 공사관리관	이 재 익	건축
		도시철도설비부 공사관리관	최 수 길	기계
		도시철도설비부 공사관리관	신 용 준	전기

5		관리단 검토의견

○ 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 6차 발주설계서는 ’19년 공사계획 수립에 따른 금차(6차) 세부예정공정표에 의거 물량 및 공사비(175억)를 산정하였으며,

○ 공사기간은 5차공사 준공일(’18.12.31.) 이후 ’19.01.01일로부터 ’20.01.31일 까지로 적용하여 적정하다고 판단됨.

6		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 6차 공사를 발주하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관리단 공문 및 검토의견서 1 부.

2. 발주설계서 1 부.

3. 수량산출서 1 부(용량초과로 별도첨부).

4. 발주 요약서 1 부.

5. 예정공정표 1 부.

6. 발주도면 1 부.(용량초과로 별도첨부)  끝.