문서번호	도시철도토목부-2841
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
조규양		윤방식	03/19 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

기존5호선 접속구간 벽체 조치방안 검토

2019. 03.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

기존5호선 접속구간 벽체 조치방안 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』의 기존5호선 접속구간(STA 0+95 ~ 98.5, 상행) 기존벽체의 구축한계 저촉에 따른 시공방안 검토 보고임

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.03.30. ~ 2020.12.31.

○ 공사금액 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○ ‘19.02.01. : 궤도 구조물 측량시 구축한계 저촉에 따른 확인측량 요청

- STA 0+95 ~ 98.5

○ ‘19.02.11. : 확인측량 결과 회신

- 당초 설계대비 기존벽체 현황이 최대 28㎝ 차이

○ ‘19.02.20. : 관련 분야 합동회의

- 설계사, 토목, 궤도, 시스템(전기, 신호, 통신, 소방)

○ ‘19.02.25.~03.11. : 시스템 분야 시설물 설치 관련 협의

- ***************************************

3		보고내용

○ 측량 현황

*

- **************************

- ********************

○ 관련분야 회의 및 협의 결과

- *************************************************************

- *****************************************************

○ 현황사진

4		조치의견

○ ************************************** *************************************************************

○ 궤도 및 시스템 등 후속공정의 원활한 추진을 위하여 우선 사업시행하고 추후 설계변경시 정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시스템분야 시설물 설치 관련 협의 회신 1 부.   끝.