문서번호	토목부-5970
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
윤효진	김동현	김영수		04/09 이택근
협 조

착수보고회 개최 결과보고

(내부순환로 월곡IC 구조개선 기본 및 실시설계)

2019. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

착수보고회 개최 결과보고

(내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계)

“내부순환로(월곡IC)구조개선 기본 및 실시설계” 용역의 실시설계용역 착수보고회 개최결과 및 향후 추진계획을 보고드림.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계

○ 위    치 :

- 성북구 하월곡동 37번지 일대(월곡역 주변)

- 성동구 성수동 서울숲 주변

○ 규    모

- 진출연결로(1차로) 신설 1개소(L=416m, B=5.0m)

- 강변북로(서울숲 주변) 차로운영 및 신호체계 개선

○ 용역기간 : 2018. 4.30. ~ 2019. 5.30.

○ 용역금액 : 559,900천원

○ 용 역 사 : ㈜서영엔지니어링, ㈜도화엔지니어링, ㈜솔빛이엔씨

□ 보고회 개요

○ 건  명 : 내부순환로(월곡IC)구조개선 착수보고회

○ 일  시 : 2019.4.2.(화) 14:00~15:00

○ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

○ 참석자 : 시설국장 외 5

○ 보고자 : ㈜서영엔지니어링 사업책임기술자

□ 보고내용

○ 기본설계 추진현황

○ 향후 실시설계 추진계획

□ 주요 의견

○ 월곡IC 구조개선

- 본선 연결 구간 접근로 테이퍼 설치 기준의 적합여부를 확인하고, 진출로의 분기점이 곡선부에서 발생되어 분기점 길이 안정성 확보 필요

- 내부순환로, 북부간선도로를 교차하는 구간에 신설되는 진출연결로의 형고가 확보되는지 확인

- 종점부 1차로의 내부순환로에서 진출하는 차량(직진)과 2차로의 화랑교로 U턴하는 차량과의 엇갈림 현상이 발생되므로, 재검토 필요

- 신설되는 교각구간 인접 대형상수도(Φ2,400㎜) 저촉여부 확인

-「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(국토교통부고시 제2018-244호) 제45조(지반조사의 항목 및 기준)에 의거 교량의 교대, 교각마다 최소 1개소 이상 추가 지반조사 필요

- 사업구간 공사 작업차량 진출입로 확인 및 작업 공간 협소에 따른  작업공간 확보 방안 마련

○ 강변북로(서울숲주변) 교통개선

- 강변북로에서 용비교와 성수대교로 가는 차량이 위빙현상을 유발하여 교통 정체가 발생되므로 신호 현시 조정과 단순 가각 정리가 아닌 용비교로 직접 연결하는 교량설치 등 근본적인 문제해결 방안 제시.

- 동부간선도로 지하화 사업 등 주변 사업 계획을 반영하여 교통량 변화를 감안 종합적인 검토방안 강구

○ 실시설계 소요(4개월)되는 적정기간을 도로계획과와 협의하여 반영

□ 향후 계획

○ '19. 4. : 유관기관 협의

○ '19. 4. : 특정제품(공법)심의

○ '19. 5. : 디자인심의, 설계VE

○ '19. 5.30. : 용역완료

□ 행정사항

○ 실시설계 절대공기 부족에 따른 설계기간 연장 필요성 등 도로계획과 협의

붙임 1. 착수보고회 발표자료 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.