의원 요구 자료 제출

시 행	광화문광장추진단-5028
결재일자	2019.5.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	재무과장

★주무관		광장정책팀장	광화문광장기획반장	광화문광장추진단장	도시재생실장	결재
이용옥		김정범	조영창	강옥현	전결 05/03 강맹훈
협 조

제 목	결산검사의원 요구자료 제출(요구번호 2019-150번, 고병국의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

고병국 의원(도시계획관리위원회, 더불어민주당)

□ 새로운 광화문광장 조성 2018회계연도 예산이월 사유

1. 새로운 광화문광장 조성 (201-01) 사무관리비(540,000,000원) 중 사고이월액(180,000,000원)의 비목 및 이월 사유

2. 새로운 광화문광장 조성 (401-01) 시설비(2,150,000,000원) 중 사고이월액(1,204,287,500원)의 발생 사유를 발생 건별로 구분하여 작성

□ 새로운 광화문광장 조성 관련 의원님 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 새로운 광화문광장 조성 (201-01) 사무관리비(540,000,000원) 중 사고이월액(180,000,000원)의 비목 및 이월 사유

(단위 : 천원)

용역명	계약금액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
새로운 광화문광장 조성 관련 시민소통 및 홍보 기획운영 용역	180,000	0	180,000	용역을 시민위원회 및 주민의견 수렴 후 시행하여 ’18.10로 발주 지연됨에 따라 용역 준공시기 미도래(’18.12.14~’19.3.31)

2. 새로운 광화문광장 조성 (401-01) 시설비(2,150,000,000원) 중 사고이월액(1,204,287,500원)의 발생 사유를 발생 건별로 구분하여 작성

용역명	계약금액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	1,696,410	492,122	1,204,288
세종로 지구단위계획 재정비 용역	280,000	140,000	140,000	기본계획 발표(’18.4.10)에 맞춰 적의 발주되었으나, 2회 유찰에 따른 계약지연 및 1차 계약의 준공시기 미도래(’18.6.21~’19.2.28)
새로운 광화문광장 조성 설계공모 관리용역	281,500	140,750	140,750	기본계획 수립(’18.6.1) 이후 용역을 발주(’18.6.15)함에 따라 용역의 준공시기 미도래(’18.7.25~’19.2.24)
설계공모 보상비	500,000	0	500,000	설계공모 순연(’18.10.12)에 따라 ’19.1에 당선작 발표한 바, 수상자에 대한 설계보상비 집행시기 미도래하여 원인행위 미필 이월
광화문 일대 역사 콘텐츠 구상 및 문화재 발굴(시굴) 조사 용역	344,000	172,000	172,000	기본계획 수립(’18.6.1) 이후 용역을 발주(’18.6.15)함에 따라 용역의 준공시기 미도래(’18.7.25~’19.2.24)
새로운 광화문광장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역	51,765	25,800	25,965	새로운 광화문광장 조성사업 추진을 위하여 이행되어야 하는 제반절차 중 하나로, 용역 준공시기 미도래(’18.10.4~’19.7.31)
새로운 광화문광장 조성 관련 사전재해영향성 검토 용역	27,145	13,572	13,573	새로운 광화문광장 조성사업 추진을 위하여 이행되어야 하는 제반절차 중 하나로, 용역 준공시기 미도래(’18.10.29~’19.4.29)
세종로 지구단위계획 재정비 관련 교통영향평가 용역	212,000	0	212,000	세종로 지구단위계획 재정비 용역의 후속 절차로, 광화문 교통대책위원회의 자문사항 수렴에 따른 발주지연(’18.10)에 따라 준공시기 미도래 (’18.12.5~’19.8.31)

(단위 : 천원)

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (광화문광장추진단)	담당사무관	김정범
	☎ 2133-7727	주무관	이용옥
	작 성 일 : 2019. 5. 2.