문서번호	도시철도토목부-5619
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
조규양		윤방식	05/29 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

기존5호선 분야별 합동점검 관련 현장실정보고 검토

2019.  5.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

기존5호선 분야별 합동점검 관련 현장실정보고 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』의 기존5호선 접속부 기존벽체 구조물의 건축한계 부족구간에 대한 분야별 합동점검 관련 건설사업관리단으로부터 제출된 현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토 보고함

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ~ 2020.12.31.

○ 공사금액 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○ ‘19. 2.  1. : 궤도분야 구조물 측량시 구축한계 저촉에 따른 확인측량 요청(궤도→시공사)

○ ‘19. 2. 11. : 확인측량 결과 회신(시공사→궤도)

○ ‘19. 2. 20. : 분야별 합동회의

○ ‘19. 3. 19. : 기존5호선 접속구간 벽체 조치방안 통보(본부→관리단)

- 건축한계 부족구간 벽체 절삭 및 통신케이블트레이 통과 구간 벽체천공

○ ‘19. 4. 10. : 본선시점부 벽체 관통 협조 요청(시스템관리단→관리단)

3		실정보고 내용

○ 관련분야 합동회의 및 협의 결과 반영

- 건축한계 부족 구간의 벽체를 절삭하여 건축한계를 확보하고 벽체를 천공하여

통신케이블트레이 우회

※ 합동회의 관련분야 의견

· 건축한계 확보를 위한 궤도 선형변경은 불가함(분기기 이동 불가)

· 기존벽체를 천공하여 통신케이블트레이 우회 가능함

· 송변전, 전차선, 신호, 기계설비 분야는 해당구간에 시설물 설치계획 없음

○ 평면도

통신트레이 슬리브 설치

(400×700)

마감벽구간(절삭)

TYPE1-5(절삭)

○ 현황사진

면 정 리	절삭(20mm) 면 정 리 벽체슬리브(0.4×0.7)
STA 0+000~015[L= 18.1m]	STA 0+095~104.5[절삭, 면정리 L= 9.5m]

○ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단 위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
콘크리트 천공		m	-	19.6	19.6
시멘트 액체 방수		m2	-	149	149
강관비계	손율 3개월	m2	-	108	108
방진망		m2	-	85	85

○ 공사비 변경 현황

(단위: 천원)

구 분	규 격	당 초	변 경	증 · 감	비 고
콘크리트 천공			5,777	5,777
시멘트 액체 방수		-	3,312	3,312
강관비계	손율 3개월	-	1,612	1,612
방진망		-	795	795
직접공사비		-	11,496	11,496
제잡비		-	5,604	5,604
도급금액		-	17,100	17,100

4		건설사업관리단 검토 의견

○ 본선1구간 기존5호선 접속부 기존 벽체에 대한 궤도분야 구조물 확인 측량시 구축한계 저촉으로 분야별 합동회의와 관련분야 협의 결과 통보에 대한 실정보고 검토로서,

○ 수량 및 단가 산출은 적정하게 적용되었으며, 추가 공사비(17,100천원)는

설계변경 자문위원회 심의를 거쳐 설계 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 기존5호선 접속부 기존 벽체 건축한계 확보 관련 실정보고 건에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 공사비 증액 17.1백만원

○ 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1 식.   끝.