문서번호	도시철도토목부-6463
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
조규양		윤방식	06/21 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

공사장 주변 시민편의시설 설치 관련 실정보고 검토

2019.  6.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

공사장 주변 시민편의시설 설치 관련 실정보고 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』의 공사장 주변 시민편의시설 설치 관련 건설사업관리단으로부터 제출된 현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토 보고함

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ~ 2020.12.31.

○ 공사금액 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○ ‘19. 1. 24. : ’19년 신년업무보고

- 공사장 주변 시민편의시설 제공 방안

○ ‘19. 3. 19. : 편의시설(그늘막, 한파쉼터) 설치방안 수립

- 건설공사장 근로자를 위해 설치하는 편의시설을 공사장 주변에 확대 설치하여 시민들에게 편의 제공 및 공사장에 대한 부정적 이미지 개선

○ ‘19. 4.  2. : 시민편의시설 설치방안 시행 통보(본부→관리단)

3		실정보고 내용

○ 편의시설(그늘막) 설치 위치

상일동역교차로

환기구#1앞 교차로

○ 편의시설(그늘막) 설치 검토

- 설치기간 : 매년 5~9월(5개월간)

- 설치장소 : 2개소(상일동역사거리 1개소, 환기구#1 앞 사거리 1개소)

- 운영방안 : 시공사 및 관리단 담당자 지정 관리

기상상황(태풍, 호우주의보 등)에 따라 운영중지

구 분	홀 더 형	텐 트 형	비고
사진
장,단점	- 내구성 양호 - 계절에 따라 유지관리 양호 - 공사비 고가 - 보관 양호 - 강우, 강풍에 유리(기초매설)	- 내구성 부족 - 계절에 따라 유지관리 불리 - 공사비 저가 - 보관 불리(재사용 제한) - 이동설치 가능
공 사 비	7,100천원(3,550천원/개소)	2,100천원(1,055천원/개소)
적용(안)		◯

○ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단 위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
그늘막 설치	3 × 5	개소	-	2	2

○ 공사비 변경 현황

(단위: 천원)

구 분	규 격	당 초	변 경	증 · 감	비 고
그늘막 설치	3 × 5	-	1,815	1,815
직접공사비		-	1,815	1,815
제잡비		-	295	295
도급금액		-	2,110	2,110

4		건설사업관리단 검토 의견

○「공사장 주변 시민 편의를 위한」편의시설(그늘막) 설치방안에  대한

실정보고 검토로서,

- 공사 종료 후 해당 자치구와 협의 후 철거 또는 인수 · 인계 결정

- 추후 공사장 주변 편의시설(한파쉼터) 설치 보고 예정

○ 수량 및 단가 산출은 적정하게 적용되었으며, 추가 공사비(2,110천원)는

발주처 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 설계 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공사장 주변 시민편의시설 설치 관련 실정보고 건에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 공사비 증액 2,110천원

○ 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1 식.   끝.