문서번호	도시철도토목부-9505
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		윤방식	09/10 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

유관기관 공사장 주변 도로정비 요청에 따른 포장 유지보수(2차) 관련 현장 실정보고건 검토보고

2019. 9.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

유관기관 공사장 주변 도로정비 요청에 따른

포장유지보수(2차) 관련 현장 실정보고건 검토보고

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』의 공사구간 내 아스팔트 포장 노후 및 노면 파손에 따른 유관기관(동부도로사업소)의 공사장 주변 도로정비 요청과 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 현장 실정보고 건에 대하여 아래와 같이 검토보고함.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ~ 2020.12.31.

○ 공사금액 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○  ’18.12.21 : 지하철 공사장 주변 도로정비 요청(동부도로사업소→본부)

- 대상위치 : 강동구 상일로 및 고덕로(상일동역 교차로 주변)

○  ’18.12.24 : 지하철 공사장 주변 도로정비 요청(본부→관리단)

○  ’19.01.11 : 실정보고[유관기관 공사장 주변 도로정비 요청에 따른 포장 유지보수(2차)) 검토보고](관리단→본부)

○  ’19.08.07 : 유관기관 공사장 주변 도로정비 요청에 따른 포장 유지보수(2차)) 검토보고 관련 재검토 요청(본부→관리단)

○  ’19.09.03 : 실정보고[유관기관 공사장 주변 도로정비 요청에 따른 포장 유지보수(2차)) 재검토 결과 보고](관리단→본부)

3		실정보고 내용

○ 상일동역 교차로, 고덕천 가교, 강일육교 등 공사장 주변 아스팔트포장 보수

- 공사구간내 공공도로 포장의 노후, 파손으로 유관기관(동부도로사업소)의 요청에 따라 차량 및 보행자 안전사고 예방을 위해 포장 유지보수 시행(2차)

○ 기존도로 포장 보수 위치도

○ 포장보수 시행 위치별 수량 산출 현황

위 치	보 수 구 간						포장수량(ton)	비 고
	면 적(㎡)			체 적(㎥)
①		12.4			0.62		1.480
②		9.0			0.45		1.074
③		8.9			0.445		1.062
④		15.0			0.75		1.790
⑤		13.0			0.65		1.551
⑥		10.8			0.54		1.289
⑦		8.6			0.43		1.026
⑧		7.5			0.375		0.895
⑨		6.0			0.30		0.716
⑩		8.0			0.40		0.955
⑪		3.0			0.15		0.358
⑫		13.6			0.68		1.623
⑬		30.0			1.50		3.580
⑭		204.8			10.24		24.441
계		350.6			17.53		41.84	할증포함

○ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단 위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
기존도로 유지보수 포장	5cm	㎡	-	351	351
폐아스콘 소운반		㎥	-	18	18
폐아스콘 상차		㎥	-	18	18
관급자재(아스콘)	표층	ton	-	42	42
폐기물 처리(폐아스콘)		ton	-	41	41

○ 공사비 변경 현황

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
8. 도로복구공
기존도로 유지보수 포장	-	11,067	11,067
폐기물 소운반	-	203	203
폐아스콘 상차	-	44	44
직접공사비	-	11,314	11,314
간접공사비	-	5,186	5,186
도급금액	-	16,500	16,500
관급자재비	-	2,600	2,600
폐기물 처리비	-	1,000	1,000
총 공 사 비	-	20,100	20,100

4		건설사업관리단 검토의견

○ 차량 및 보행자의 안전사고 예방을 위한 포장유지보수건은 유관기관의

요청에 따라 실시공 물량대로 정산 반영 조치함이 적정한 것으로 판단됨.

- 시방서 제4장에 ‘시공자는 도시미관 유지, 시민불편 방지를 위해 환경정비 실시하여야 한다’ 라고 되어 있으나,

- 설계도서인 시방서에 명기된 내용이 도면 및 물량내역서에 누락되어 있어 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 조건인 ‘설계도서의 내용 불분명, 누락, 오류, 상호 모순되는 점이 있을 경우’ 설계변경 대상에 해당됨.

○ 수량 및 단가 산출은 적정하게 적용되었으며, 추가 공사비(20백만원)는 설계변경

소위원회 심의를 거쳐 설계변경함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공사구간 내 아스팔트포장 노후 및 노면 파손에 따른 유관기관(동부도로사업소) 의 공사장 주변 도로정비 요청 관련 실정보고 건에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 추가공사비 : (증) 20.1백만원

- 기존 도로 유지보수 현황(붙임 참고)

○ 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 실정보고서 1부

2. 실정보고 재검토 결과보고서 1부

3. 기존 도로 유지보수 사진대지(전·후) 1부.  끝.