투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	KT 강동지점장
(경유)
제목	고덕천 통신관로(10개소) 이설 협조 요청

1. 우리 시정 발전을 위하여 많은 관심과 협조에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사와 관련하여 고덕천 가교 철거 및 교량 본공사 진행에 저촉되는 LGU+ 및 SKB는 2019.10.25. 이설을 완료하였으며, SKT는 2019.11.12. 이설할 예정이나,

3. 귀 기관의 통신관로(10개소) 이설이 현재까지 진행되지 않아 후속공정인 가도 및 작업장 조성, 가시설 및 구조물 설치공사가 지연되고 있습니다.

3. 또한 고덕천교 설치공사는 하천 내에서 이루어지므로 2020년 5월 이전(수방기간 시작 전)까지 공사를 마무리 할 수밖에 없는 상황임을 감안하여 조속히 통신관로 이설에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  현황사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이형일		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	11/05 정대현
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-11480	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부	/
전화	02-772-7212	/전송	02)772-7306	/	thanks@seoul.go.kr	/	대시민공개