문서번호	도시철도계획부-10713
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
최원혁		이명수	12/04 김진팔
협조

위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

설계변경 검토 보고

2019 . 12.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

설계변경 검토 보고

「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」과 관련하여 「서울시 도시철도건설기준에 관한 규칙」개정 과업 추가에 따라 설계변경 시행코자 검토 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

○ 위    치 : 마천역 ~ 복정역․우남지선

○ 규    모 : 연장 5.0km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 용역기간 : ’19.8.13. ~ ’20.6.7.(10개월)

○ 용 역 비 : 770,894천원

○ 용 역 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 8개사

□ 추진현황

○ ’19.08.07. : 용역 계약

○ ’19.08.13. : 용역 착수

○ ’19.08.19. : ‘서울시 도시철도건설기준에 관한 규칙’ 개정 추가과업 수행 요청

○ ’19.09.02. : 용역 착수보고

○ ’19.09.27. : 기본계획 및 규칙개정 추진방향 자문회의

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 내용 : ‘서울시 도시철도건설기준에 관한 규칙’ 개정 과업 추가

- 규칙 개정 관련 직접인건비 등 비용 추가 반영

※ 본부장 방침【도시철도계획부-7295(’19.8.19.)】에 따라 용역에 포함 시행

○ 용역비 변경내역

(단위:천원)

공 종 명	금액			비고
	당초	변경	증․감
1. 직접인건비	246,770	264,454	17,684
2. 직접경비	62,661	62,661	-
3. 제경비	271,448	290,900	19,452
4. 기술료	103,644	111,053	7,409
5. 자문비	3,450	3,450	-
6. 국외 노면전차 조사비	12,840	12,840	-
계	700,813	745,358	44,545
부가가치세	70,081	74,536	4,455
용 역 비	770,894	819,894	49,000

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 규칙 개정 과업 추가에 따른 설계변경을 시행코자 함

- 예산과목 : 도시철도 및 광역철도 건설, 광역철도 건설사업, 위례선 도시철도 건설, 시설비

붙임 : 변경설계서 1부.  끝.