문서번호	도시철도토목부-13219
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		윤방식	12/20 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 조정 검토보고(총괄6회, 6차1회)

2019. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 조정 검토보고(총괄6회, 6차1회)

「하남선 (5호선 연장) 1-1공구 건설공사」와 관련 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 및 물가변동에 따른 계약금액 조정(총괄6회, 6차1회)에 대한 검토 보고임     ○ 총괄 6회 : (당초) 도급비 83,054백만원 ⇒ (변경) 95,415백만원 (증 12,361백만원)

○ 6차  1회 : (당초) 도급비 17,500백만원 ⇒ (변경) 18,800백만원 (증 1,300백만원)

※ 관련문서 : 동일(철도감)제19-3595호(‘19.12.19.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 규    모 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ～ 2020.12.31.

○ 도 급 비 : 83,054백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 단 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		계약현황

○ 총괄 및 차수별 계약현황                                 (단위 : 백만원)

구 분	계약금액	잔 액	공사기간	비 고
총 괄	83,054	15,740	’15. 3.30. ~ ’20.12.31.
1차	2,577	-	기 준공
2차	17,100	-	기 준공
3차	11,500	-	기 준공
4차	16,137	-	기 준공
5차	2,500	-	기 준공
6차	17,500	-	’19. 1.28. ~ ’20. 1.20.
잔여	15,740	15,740	’20. 1.21. 이후

○ 분야별 계약현황                                       (단위 : 백만원)

분 야 별	계약금액	잔 액	비 고
계	83,054	15,740
토 목	77,291	12,705
건 축	5,763	3,035

3		계약금액 조정 검토(총괄6회, 6차1회)

○ 관련 근거

- 건설사업관리 업무수행지침 제67조(설계변경 관리)

- 공사계약일반조건 제19조(설계변경등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정), 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

- 공사계약특수조건 제16조(설계변경 등)

- 지방자계약법 시행령 제73조(물가 변동으로 인한 계약금액의 조정),

제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) [시행 ‘19.9.26.]

○ 계약금액 조정사유

▸ 외부출입구 설계심의 심사료 반영(도로공사) (도기본-19-249호,’19.1.8.)

▸ 풍화암 매각처리 변경 (도기본-19-2096,’19.2.27.)

▸ 가적치, 유용토 사토처리 변경 (도기본-19-2344,’19.3.5.)

▸ 외부출입구 피난 시뮬레이션 용역비 반영 (도시철도건축부-1723호, ’19.3.12.)

▸ 혼합골재 구매계획 변경(관급 → 사급) (도기본-19-3208호, ’19.3.26.)

▸ 기존 5호선 헌치부 철거 승인 (도기본-19-3861호, ’19.4.9.)

▸ 외부출입구 #1 돌출 기초콘크리트 깨기 (도기본-19-3864호, ’19.4.9)

▸ 구조물공사 방수공법 변경 (도기본-19-6695호,’19.6.13.)

▸ 기존 5호선 방수층, 보호층 철거 (도기본-19-6858호,’19.6.17.)

▸ 고덕천교 거더제작장 조성 및 철거 (도기본-19-7342호,’19.6.26.)

▸ 고덕천교 거더 소운반 및 가설 (도기본-19-7338호,’19.6.26.)

▸ 동절기 보온양생비 반영 (도기본-19-7160호,’19.6.24.)

▸ 공사장 주변 시민편의시설 설치 (도기본-19-7152호,’19.6.24.)

▸ 교통소통대책(복공철거) 반영 (도기본-19-8757,’19.7.30.)

▸ 철도운행안전관리자 변경 (도기본-19-11545호,’19.10.7.)

▸ 본선 1구간 지장 폐기물 정산 반영 (도기본-19-12724호,’19.11.5.)

▸ 기존 5호선 벽체 철거 물량 정산 (도기본-19-12937호,’19.11.8.)

▸ 외부출입구 변경 설계도서 검토 결과 승인 (도기본-19-13919호,’19.11.30.)

▸ 물가변동 제경비 정산 환수액 공제(기술심사담당관) (도기본-19-80호,’19.11.5.)

- 발주기관의 필요에 의한 설계변경 (공사계약 일반조건 제19조의 5)

- 현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경 (공사계약 일반조건 제19조의 3)

▸ 본선터널(52m) 정산 반영 (도기본-19-2636호, ’19.3.12.)

- 발주기관 외 유관기관 요구에 의한 설계변경

▸ 기존 5호선 합동점검 결과 반영 (도기본-19-6079호, ’19.5.30.)

▸ 대형공사장 주변 횡단보도 투광기 설치 (도기본-19-7390호, ’19.6.27.)

▸ 공사장 주변 도로정비 요청 (도기본-19-10618호, ’19.9.10.)

▸ 본선1구간 기존 5호선 정밀점검 (도기본-19-12024호, ’19.10.17.)

▸ 기존 5호선 벽체철거관련 유관기관 협의사항 반영 (도기본-19-13561호, ’19.11.22.)

- 설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서의 상호모순 등에 의한 설계변경

(공사계약 일반조건 제19조의 2)

▸ 본선구간 피스브라켓 제작 수량 누락 (도기본-19-10619호, ’19.9.10.)

▸ 본선2구간 토공내역 설계 미반영 (도기본-19-11748호, ’19.10.11.)

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정 (공사계약 일반조건 제22조)

▸ 물가변동 1~3회 (기존 계약단가 수량 증·감에 따른 물가변동 변경 반영)

▸ 물가변동 4회 (도기본-19-80호, ’19.1.3.)

○ 총괄6회 설계변경 항목                                   (단위 : 백만원)

구 분	변 경 내 용	공 사 비
		당 초	변 경	증·감
총괄 6회	▸합 계 (1~29)	19,098	31,459	증 12,361
	▸발주기관 책임있는 사유 : 소계(1~19)			증 10,737
	1. 외부출입구 설계심의 심사료 반영(도로공사)	-	4	증 4
	2. 풍화암 매각처리 변경	460	868	증 408
	3. 가적치, 유용토 사토처리 변경	2,279	2,691	증 412
	4. 외부출입구 피난 시뮬레이션 용역비 반영	-	16	증 16
	5. 혼합골재 구매계획 변경	-	151	증 151
	6. 기존 5호선 헌치부 철거 승인	-	67	증 67
	7. 외부출입구 #1 돌출 기초콘크리트 깨기	-	8	증 8
	8. 구조물공사 방수공법 변경	167	176	증 9
	9. 기존 5호선 방수층, 보호층 철거	-	57	증 57
	10. 고덕천교 거더제작장 조성 및 철거	-	39	증 39
	11. 고덕천교 거더 소운반 및 가설	42	80	증 38
	12. 동절기 보온양생비 반영	-	49	증 49
	13. 공사장 주변 시민 편의시설 설치	-	2	증 2
	14. 교통소통대책(복공철거) 반영	-	35	증 35
	15. 철도운행안전관리자 변경	90	171	증 81
	16. 본선1구간 지장폐기물 정산 반영	635	1,209	증 574
	17. 기존 5호선 벽체 철거 물량 정산	798	1,078	증 280
	18. 외부출입구 변경 설계도서 검토 결과 승인	9,273	17,810	증 8,537
	19. 물가변동 제경비 정산 환수액 공제(기술심사담당관)	-	-30	감 30
	▸현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경 : 소계(20)			감 70
	20. 본선터널(52m) 정산 반영	190	120	감 70
	▸발주기관 외 유관기관 요구에 인한 설계변경 : 소계(21~25)			증 519
	21. 기존 5호선 합동점검 결과 반영	-	17	증 17
	22. 대형공사장 주변 횡단보도 투광기 설치	-	28	증 28
	23. 공사장 주변 도로정비 요청	-	17	증 17
	24. 본선1구간 기존5호선 정밀점검	-	29	증 29
	25. 기존 5호선 벽체철거 관련 유관기관 협의사항 반영	-	428	증 428
	▸설계서의 불분명,누락,오류 및 설계서의 상호 모순등에 의한 설계변경 : 소계(26~27)			증 91
	26. 본선구간 피스브라켓 제작 수량 누락	71	93	증 22
	27. 본선2구간 토공내역 설계 미반영	-	69	증 69
	▸물가변동으로 인한 계약금액 조정 : 소계(28~29)			증 1,084
	28. 물가변동 1~3회(기존 계약단가 수량 증·감에 따른 물가변동 변경 반영)	5,093	5,136	증 43
	29. 물가변동 4회	-	1,041	증 1,041

○ 총괄6회 계약금액 조정현황                                  (단위 : 원)

구 분		당 초 (A)	변 경 (B)	증‧감 (C) (C = B-A)
토목	가설공	2,056,788,848	2,198,463,191	증	141,674,343
	본선개착	8,995,327,734	10,243,153,330	증	1,247,825,596
	본선터널	4,515,037,012	4,496,304,404	감	-18,732,608
	정거장	27,173,433,067	33,822,901,357	증	6,649,468,290
	환기구	4,145,576,868	4,247,149,692	증	101,572,824
	차량기지 입출고선	110,834,513	111,467,959	증	633,446
	고덕천교	2,568,407,904	2,615,151,143	증	46,743,239
	도로복구공	368,568,142	379,882,585	증	11,314,443
	조경공사	445,928,685	579,619,334	증	133,690,649
	도급자지장물이설비	2,473,215,256	2,473,215,256	-	-
	소 계	52,853,118,029	61,167,308,251	증	8,314,190,222
건 축		3,914,736,925	3,914,736,925	-	-
전 기		50,664,793	50,664,793	-	-
기계설비		35,743,143	35,743,143	-	-
직접공사비 계		56,854,262,890	65,168,453,112	증	8,314,190,222
제 경 비		19,190,716,192	21,817,905,970	증	2,627,189,778
미확정설계공종(PS)		891,758,000	891,758,000	-	-
제요율 제외 공종		1,024,762,918	1,359,942,918	증	335,180,000
물가변동(1,2,3,4회)		5,092,500,000	6,176,940,000	증	1,084,440,000
도 급 비		83,054,000,000	95,415,000,000	증	12,361,000,000

○ 6차1회 계약금액 조정현황                               (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
가 설 공	550	463	감	-87
본선 1구간	1,093	1,092	감	-1
본선 2구간	76	191	증	115
본선 터널	4	301	증	297
개착정거장	2,101	2,105	증	4
비개착정거장	1	272	증	271
외부출입구	2,390	3,639	증	1,249
환기구 #1	992	739	감	-253
환기구 #2	291	301	증	10
입출고선	-	1	증	1
고덕천교	1,124	453	감	-671
도로복구공	178	11	감	-167
조경공사	-	134	감	134
도급자 지장물 이설	1,092	1,040	감	-52
건축공사	1,634	1,420	감	-214
직접공사비	11,526	12,162	증	636
제 경 비	4,065	4,488	증	423
제요율 적용제외 공종	559	597	증	38
물가변동(1,2,3,4회)	1,350	1,553	증	203
도 급 비 액	17,500	18,800	증	1,300

4		설계변경 요약(총괄 금액조정)

○ 공사비 변경현황

구 분	총괄 6회		증·감	6차 1회		증·감
	당 초	변 경		당 초	변 경
총 공사비	89,060	101,999	(증)12,939	19,013	20,313	(증)1,300
도급공사비	83,054	95,415	(증)12,361	17,500	18,800	(증)1,300
관급자재비	6,006	6,584	(증) 578	1,513	1,513	-

○ 공사비 변경 사유

- 발주기관의 필요에 의한 설계변경과 당해 공사와 관련된 인.허가 유관기관 요구, 현장상태와 설계서의 상이에 의한 설계변경 및 물가변동에 의한 계약금액조정

5		건설사업관리단 검토의견

○ 발주기관의 필요에 의한 설계변경, 발주기관 외에 당해 공사와 관련된 유관기관 요구, 물가변동 등으로 증액된 12,361백만원은 총괄6회 계약금액 조정함이 타당하다고 판단되며,

○ 6차1회 변경 설계내용은 총괄 도급 물량 범위 내에서 금차분의 예산 범위에 맞게 공종간 연속성을 고려하여 물량조정함이 타당한 것으로 판단됨.

6		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(총괄6회, 6차1회) 건에 따른 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 계약금액 조정을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

- 총괄 6회

· 공사기간 : (당초) ‘15.3.30. ~ ‘20.12.31.

(변경) ‘15.3.30. ~ ‘20.12.31. [변경없음]

· 총공사비 : (당초)  89,060백만원(도급비 83,054백만원, 관급비 6,006백만원)

(변경) 101,999백만원(도급비 95,415백만원, 관급비 6,584백만원)

[증 12,939백만원 (도급비 12,361백만원, 관급비 578백만원)]

- 6차 1회

· 공사기간 : (당초) ‘19.1.28. ~ ‘20.1.20.

(변경) ‘19.1.28. ~ ‘20.1.20. [변경없음]

· 총공사비 : (당초) 19,013백만원(도급비 17,500백만원, 관급비 1,513백만원)

(변경) 20,313백만원(도급비 18,800백만원, 관급비 1,513백만원)

[증 1,300백만원 (도급비 1,300백만원, 관급비는 변동없음)]

붙임  건설사업관리단 공문 및 검토의견서 1부.  끝