투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(신상도 지하차도 확장공사)

우리부에서 시행 중인 「신상도 지하차도 확장공사」에 소요되는 관급자재(레미콘)의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 연기요청 현황

품명	납품요구번호	계약자	납 품 기 한		비 고
			당 초	변 경
레미콘	12-19-2-87944-00	유진기업(주)	2020.2.6.	2020.12.31.	원활한 공정관리

붙임  관련문서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	01/07 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-170	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	대시민공개