문서번호	운영과-7997
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	11/18 정훈모
협 조
	주무관			장혜란
	주무관			김재영

2021년 하수처리 전기설비

긴급정비(연간단가) 추진계획

2020. 11.

중랑물재생센터

(운 영 과)

2021년 하수처리 전기설비

긴급정비(연간단가) 추진계획

중단없는 하수처리를 위하여 ’20년 하수처리 전기설비 긴급정비공사(연간단가)를 회계연도 시작전(예산배정전)에 추진코자 함.

Ⅰ		관련근거 및 방향

□ 관련근거

□ 지방계약법 제23조(회계년도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결)

- 그 성질상 중단할 수 없는 계약에서는 회계년도 시작 전 ~ 계약체결

□ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 제25조, 영 제79조(단가계약)

	【 단 가 계 약 】
일정한 기간 계속하여 ~수리·보수·복구~ 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 ~ 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

□ 추진배경

□ 40년 이상된 노후 시설물로 단락, 누전사고 등 안전사고 발생 우려

□ 반복공종 보수공사 수시 발주에 따른 행정력 낭비 및 수의계약 지양

□ 추진방향

□ 사후 조치 보다는 전기시설물 사전예방 정비 방향으로 추진

□ 수방, 전기, 방재 등 안전관련 시설물 신속한 정비

□ 하수전기 시설물 적기 정비로 중단없는 가동상태 유지

□ 대상설비

수배전반	변압기 (TR)	조 명		CCTV	중앙제어	유량계		수질계측기
		실내	실외			공정	방류
267면	52대	6,128	244등	144대	1식	254대	19대	95대

Ⅱ		추진계획

□ 사업개요

□ 공 사 명

① 2021년 수처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)

② 2021년 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

□ 소요예산 : 10억 (① 5억, ② 5억)

□ 계약방법 : 제한입찰(지역제한 : 서울특별시 소재)

□ 공사내용 : 하수처리 전기시설물 긴급정비, 유지보수공사 1식

□ 공사방법 : 노후 및 고장개소에 대하여 작업지시 및 완료 조치

1 단계	정비개소 적출 (센터&현장)	➠	2 단계	작업 지시 (센터 →업체)	➠	3 단계	완료 보고 (업체→센터)	➠	4 단계	기성 지급 (요구시)

□ 예산과목

① (수처리 유지보수) 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

② (오니처리 유지보수) 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

※ 전기설비 긴급정비(연간단가) 13억 편성 (① 5억, ② 8억(5억+3억))

□ 추진일정

□ 설계·계약심사 (11월) ➡ 발주 · 공고(12월) ➡ 착공(‘21.1월) ➡ 준공(12월)

□ 기대효과

□ 시설물 고장 및 사고 발생시 신속 대응하여 안전하게 시설물 관리

□ 잦은 고장에 따른 수의계약을 최소화하여 공정하고 투명한 계약집행

붙임 1. 공사지침서

2. 설계내역서 1부.

3. 2021년 시설비 편성예산 1부. 끝.