문서번호	설비부-19180
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
유영선		오삼록	12/02 이달영
협조

『청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기공사』

실정보고 사항 검토보고

『청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기공사』관련 건설사업관리단으로부터 토목선형 변경에 따른 실정보고가 있어 검토 보고드림

1		공사개요

□  공 사 명 : 청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기 공사

□  위    치 : 청계광장 ~ 고산자교

□  공사기간 : 2020. 10. 14 ~ 2021. 03. 31.

□  공 사 비 : ************

□  감리사/시공사 : ******************

2		관련근거

□ 교통신호기 추가이설에 따른 실정보고의 건

- 청계천 제2020-25호(2020.12.01.)

□ 업무연락전- 도시기반시설본부 토목부-20-14563(2020.11.25.)

- 업무지시내용 : 현안, 민원 및 안전관련 사항 조속 추진

3		실정보고 내용

□  청계천로 자전거 전용도로 토목공사 선형 변형에 따른 교통신호지주가 자전거전용도로에 저촉되어 사고가 우려되므로 이설이 요구됨.

- 마전교 외 5개소 신호지주 이설 6본. 교체 1본, 가로등주 이설 3본

- 계략공사비 20,000천원

□  건설사업관리자 검토의견

- 토목공사 구간내 저촉되는 신호등주를 이설 설치하는 것이 타당하다고 판단되어 설계에 반영.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리자의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 실정보고 사항을 승인하여 내역에 반영하고 현장관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 실정보고 건설사업관리단 공문 1부.. 끝.