문서번호	서남권사업과-10323
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	개발계획팀장	서남권사업과장		지역발전본부장
안동국	이일환	서병철		12/08 서노원
협 조

- 목동유수지·목동운동장 일대 발전 -

기본구상 수립용역 계약변경

2020. 12.

지역발전본부

(서남권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 목동유수지·목동운동장 일대 발전 -

기본구상 수립용역 계약변경

장기계속계약으로 시행중인 목동유수지⋅목동운동장 일대 발전기본 구상  수립용역과 관련, 아래와 같이 설계변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 목동유수지⋅목동운동장 일대 발전 기본구상 수립용역

○ 대 상 지 : 양천구 목동 914번지 일대(약 251,877㎡)

○ 용역업체 : ㈜비엠도시건축사무소(대표 이현구)

○ 계약금액 : 495,000천원(1차수:300,000천원, 2차수:195,000천원)

○ 계약일자 : 2020. 5.19.(착수일자 : 2020. 5.20.)

○ 완수기간 : 2020.12.31.(총 완수기간 : 2021.11.19.)

○ 주요과업 내용

- 지역현황조사 및 관련계획분석 / 비전 및 전략방향 수립

- 목동유수지⋅목동운동장 기본구상 / 부분별 계획 수립

- 사업성 분석 및 사업실행화 방안 마련 등/ 행정절차 이행 등

□ 추진경과

○ '20. 6.12.	착수보고회 개최

	< 주요 보고내용(비전 및 목표) >
◌ 기존 도시구조 및 수변 연결성 강화를 위한 교통 및 보행축 등 공간구조 재편 ◌ 목동 중심지구 강화를 위한 복합적 토지이용계획 수립 ◌ 목동 유수지의 입체적 활용을 통한 혁신성장거점 조성 ◌ 목동 운동장 재구조하를 통한 서남권 대표 수변복합 문화거점 조성

○ '20.10.22.	중간보고회 개최(1차)

	< 주요 보고내용 >
◌ 유수지, 운동장 부지별 특성에 따른 개발규모 검토 및 도입기능 설정(안) ◌ 청소시설의 합리적 해경방안 검토(안) ◌ 유수지 특성을 고려한 토지이용계획 검토(안) ◌ 목동 창업밸리운영구조 및 창업지원시설구체화 검토(안)

○ '20. 6.~12.    전문가 자문(6회), 공정점검회의 개최(4회)

□ 설계변경 사항

○ 관련법령 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규) 제1장 7절(실비정산) 및 제14장 용역계약 일반조건(계약금액 조정)

○ 변경사유 : 코로나19 확산 예방을 위해 자문인원 및 횟수 조정에 따른 자문비 실비정산 금액 반영

○ 변경내용 : 자문비 3,225천원 감액

구 분		당 초	변 경	비 고
계약 금액	총차	495,000,000	491,775,000	감) 3,225,000
	1차수	300,000,000	296,775,000	감) 3,225,000
	2차수	195,000,000	195,000,000	변경없음
계약 기간	총차	’20.5.20~’21.11.19	변경없음
	1차수	’20.5.20~’20.12.31	“
	2차수	~’21.11.19	“

○ 자문비 변경 세부내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총차	16,500,000원	13,275,000원	감) 3,225,000
1차수	8,250,000원	5,025,000원	감) 3,225,000
2차수	8,250,000원	8,250,000원	변경없음

**************************

****	****	********
******	**********	************************************* *************************************
*******	**********	**************************************

□ 향후계획

○ '20.12. 9.        변경 계약의뢰(서남권사업과→재무과)

○ '20.12.11까지    1차 준공신고서 제출(용역사→나라장터에 전자제출)

○ '20.12.18까지    1차 준공검사 및 이호조 검수처리(서남권사업과)

○ '21. 1.           2차수 용역 계약체결

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.