문서번호	광화문광장추진단-4936
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	광장계획팀장	광화문광장사업반장	광화문광장추진단장		재생정책기획관
장승권	강성필	임창수	정상택		06/17 양용택
협 조
	광장재생팀장			변종진

「새로운 광화문광장 조성」관련

기본·실시설계 용역 준공기한 연기계획 보고

2021. 6.

서울특별시

(광화문광장추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「새로운 광화문광장 조성」

기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기계획 보고

「새로운 광화문광장 조성」관련 시민소통 결과(`19.9~12월) 설계반영 이후, 문화재 정밀발굴조사 및 정책여건변화에 따라 보완발전(`21.4.27)을 위한 설계보완, 역사광장 조성을 위한 사전행정절차 진행 등을 위해 용역준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		사업현황

□ 사업계획(안)

○ 사업목적 : 광화문 일대를 시민중심의 대한민국 대표공간으로 조성

○ 사업내용 : 광장확대 조성 18,840㎡ ⇒ 40,300㎡ (약2.14배)

- 역사광장 : 약14,100㎡, 월대 및 해태상 복원, 사직·율곡로 노선유지(8~10차선)

- 시민광장 : 약26,200㎡, 공원같은 광장, 세종대로 차로축소(10~12차선 →7~9차선)

○ 사 업 비 : 791억원(국비 128.5, 시비 662.5-보상비 제외) ※ 사업기간 : `17년~`23년

□ 주요경위

○ `16.9~`17.5  광화문포럼 구성 및 운영(광장 조성방향과 원칙 마련)

○ ’17.7.19       광화문 재구조화, 국정과제 발표 (국정기획위원회)

○ `18.4.10	광화문광장 재구조화 기본계획 발표(문화재청, 서울시)

○ `19.7~8	행정안전부·시민단체 의견 제시(비전 및 소통 부족)

○ `19.9~12	시민소통 추진(61회, 12,115명 참여)

○ `20.2.13	시민소통 결과 및 사업추진 방향 대외발표

○ `20.9.28	사업추진계획 대외발표

○ `20.11.16	사업착공계획 대외발표 (권한대행)

○ `20.11.16	공사착공

○ `21.4.27     언론 브리핑 (시장)

- 주요요지 : 매몰비용 최소화, 행정 연속성 유지 등 완성도 높여 추진

- 보완·발전 방안 : ①역사성 강화(월대복원 등), ②스토리텔링, ③주변연계 활성화

Ⅱ		용역현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역

- 1차 : 역사광장 설계, 월대 우회도로, 미래비전, 지하구상, 홍보영상 등

- 2차 : 시민광장 설계, 해치마당 리모델링, 마스터플랜, 지하네트워크 기본구상, CG

○ 용역기간 : `19.3.22.~ `21.6.30

- 1차 : `19.3.22~`20.12.22(21개월)  - 2차 : `19.11.26~`21.6.30(20개월)

○ 용 역 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소, ㈜유신, ㈜선인터라인건축사사무소

************************************************

****************************************************

○ 과업내용 : 조경, 토목, 건축 등 시설계획, 경관계획 등 기본 및 실시설계

□ 주요경위

○ `19.01.21 : 새로운 광화문광장 조성 설계공모 당선작 발표(서울시)

○ `19.03.21 : 기본 및 실시설계 용역계약

*************************************************

**************************************************************************

○ `19.11.25 : 1차수 용역금액 및 계약기간 변경

*****************************************************

*************************************************

******************************************************

○ `19.12.27 : 2차수 용역금액 및 계약기간 변경

*************************************************

*************************************************

************************************************************************

○ `20.6.22 : 1+2차수 용역금액 및 계약기간 변경

***************************************************

*******************************************************************

********************************************************************************

○ `20.12.11 : 2차수 용역금액 및 계약기간 변경

*************************************************

*******************************************************************

******************************************************************************

Ⅲ		용역 준공기간 연기

□ 추진근거 : 『새로운 광화문광장 조성』 관련 보완‧발전 추진방안

(광화문광장추진단-4066, `21.5.12 / 행정2부시장 방침)

□ 변경계획(안)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`19.3.22 ~ `21.6.30 (약27개월)	`19.3.22 ~ `21.12.31 (약33개월)
1차	`19.3.22 ~ `20.12.22 (약21개월)	-	준공 (`20.12.22)
2차	`19.11.26 ~ `21.6.30 (약20월)	`19.11.26 ~ `21.12.31 (약26개월)	증6개월

□ 준공기한 연기내용

○ (귀책사유) 서울특별시 (지체상금 부과여부 : 미부과)

****************************************************************************************************************************

*******************************************************

********************************************

****************************************************

*******************************************************

****************************************************

************************************************

□ 조치계획

○ 2차 계약분에 대해서 용역 준공기한 연기의뢰(재무과)하고 변경계약

추진하고자 함

○ `21.1~6월중 추진한 과업에 대한 기성금 `21.6월중 지급 검토

**************************