코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	새로운 광화문광장 조성사업 보완.발전 설계 관련 협의회신

1. 도시기반시설본부 토목부-13805(`21.7.16)호, ************************와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 새로운 광화문광장 조성사업 추진일정은 `22.4월 시민광장 개장 및 사직로 선형변경공사 완료를 목표로 설정한 바 있으며, 이에 따른 주요업무로  `21.5~7월 보완설계, `21.7~8월 사전행정절차, `21.10~11월 사직로 선형변경공사 착수될 수 있도록 추진중에 있습니다.

*************************************************************************************************************************************

4. 설계가 다소 지연됐으나, 목표공정에 차질이 발생하지 않도록 조속히 설계 및 사전절차를 완료할 예정이오니, 절대공기 확보 등을 위해서 설계변경이 불필요한 구간에 대해 즉시 집중공사 추진될 수 있도록 많은 협조를 바랍니다.

가. 先시공 물량 시공(중앙지하보차도~해치마당 경사로간 광장부 포장, 현대해상 조업도로, 해치마당 스탠드, 정부서울청사앞 진출입구 보차도 정비)

나. 이순신장군~세종대왕동상부간 등 잔여 포장깨기 작업

다. 광장내 잔여토사 및 폐기물 반출, 광장내 폐하수관 철거

라. 광화문앞 현장사무실 철거

마. 광화문광장 전면부(이순신 장군동상앞) 횡단보도 정비 및 디자인휀스 추가설치

바. 세종대로 사거리 차도정비 마무리(수로철거, 차도정비, 차선도색)

사. 시민불편 해소를 위한 주요사거리 임시그늘막 설치(광장관리사무소 7개 보관중). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장승권		광장계획팀장	강성필		광화문광장사업반장	07/21 임창수
협조자
시행	광화문광장추진단-102	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시 신청사 10층 광화문광장추진단	/
전화	02-2133-7716	/전송	02-2133-0894	/	jang06@seoul.go.kr	/	부분공개(5)