코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	궁능유적본부장(복원정비과장)
(경유)
제목	경복궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업 사업계획 및 설계 변경승인 요청

1. 문화재청 궁능유적본부 복원정비과-3241(`20.6.29), 복원정비과-4919(`20.9.28)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 추진중인 「새로운 광화문광장 조성사업」에 대하여 보완·발전 추진계획(`21.6.24 대외발표) 및 여건변화(월대 우회도로 하부 매장문화재 발굴)에 따라 사업추진방향에 대한 내용을 반영하여 ‘경복궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업’ 사업계획 및 설계를 다음(첨부)과 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사유

o 보완·발전 추진(역사성 강화, 스토리텔링, 주변연계)(`21.6.24 대외발표)

o 월대 복원을 위한 사직로 우회도로하부 매장문화재 발굴(`21.6.16 문화재청 심의)

나. 사업계획 변경사항

o 도로선형 (변경없음)

- 사직로~율곡로 : 현재 노선을 유지하여 월대 발굴 및 복원을 위한 “Y”자형 우회도로 개설

- 세종대로 : 세종문화회관측 서측광장 조성

※ 여견변화에 맞춰 사직로 하부 매장유구 보호를 위해 사직로 도로레벨 유지, 월대 및 주변부 약0.7m인하

o 문화재 복원

- 당초 : 광화문 월대 복원

- 변경 : 광화문 월대 복원, 해치상 이전

o 사업추진 시기 변경 / 시행주체

사업내용	당 초	변 경	시행주체
사직로 선형변경 및 역사광장 조성	`18년 ~ `21.12월	`18년 ~ `23년	서 울 시
광화문 월대복원(발굴, 설계, 복원) 및 해치상 이전	`21년 ~ `23년	변경없음	문화재청

o 2021년 예산 계획 : 총11,981,840천원 (변경없음)

- 예산구성 : 사고이월 485,040천원, 명시이월 9,246,800천원, 본예산 2,225,000천원

- 세 목 별 : 시설비 10,745,840천원, 감리비 1,216,000천원, 시설부대비 20,000천원

※ 사업계획 변경에 따른 총사업비 및 연차별 집행계획은 문화재청 협의를 거쳐 추후 확정

o 2021년 사업내용 변경

- 당초 : 도로(우회도로 포함) 개설 및 역사광장 조성(1차), 건물 및 토지보상

- 변경 : 도로(우회도로) 개설 착수 및 역사광장 조성(1차)

[건물 및 토지보상은 2022년 추진]

다. 설계도서 승인 : 별첨자료 참고

붙임 : 설계도서 및 설명용 PT(책자형 별도송부). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장승권		광장계획팀장	강성필		광화문광장사업반장	08/05 임창수
협조자
시행	광화문광장추진단-484	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시 신청사 10층 광화문광장추진단	/
전화	02-2133-7716	/전송	02-2133-0894	/	jang06@seoul.go.kr	/	대시민공개