(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

신상도 지하차도 확장공사

공사개요

· 위치 : 동작구 상도동 159-21~207-5

· 규모 : 도로 확장 2→4~6차로, L=324m

(지하차도 확장 2→4차로, L=221m)

· 공사기간 : 2007.12.31.~2022.4.30.

· 도 급 비 : 18,929,900천원

· 시공사 : (유)한백종합건설 외 1개사

· 감리단 : 극동엔지니어링㈜ 외 2개사

· 설계사 : ㈜유신

실정보고 건명

지하차도 상부도로(차도부) 열선 설치(신상도감 2021-482호, '21.12.30.)

실정보고 사유

시설물 유지관리기관(동작구 도로관리과), 인근 초등학교, 주민 등의 요청사항을 반영하여 지하차도 상부도로 차도부에 열선을 설치함으로써 경사로 구간의 결빙에 대한 차량 안전을 확보하고 통행을 원활히 하고자 함.

건설사업관리단

검토의견

신규비목 단가는 최소 견적서를 기준으로 협의율(90.609%)을 적용하여 적정하게 산출한 것으로 판단됨.

공기에 미치는 영향

해당사항 없음

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
규 모	-	열선 설치 810㎡	증) 열선 설치 810㎡
공사비	-	258,962천원	증) 258,962천원

예산조치 계획

별도(추가) 예산 확보 필요

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처 검토의견

지하차도 상부도로(차도부) 열선 설치에 대하여 승인 통보하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

결재

주무관

이시연

방재시설과장

김태중

방재시설부장

12/31

박홍봉

협조

주무관

김소연