문서번호	토목부-24534
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	12/31 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

관계기관 요청사항 설계반영 실정보고

(배드민턴장 휀스 및 임시화장실 설치)

2021. 12.

도시기반시설본부

(토   목   부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

관계기관 요청사항 설계반영 실정보고

(배드민턴장 휀스 및 임시화장실 설치)

한가람로 시설램프 공사와 관련하여 관계기관(송파구) 요청사항(배드민턴장 휀스 및 임시화장실 설치)에 대해 타당성을 검토하고 설계에 반영코자 실정보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

○ 송파구청 문화체육과-29639(2021.11.5.) : 공사관련 배드민턴장 휀스 및 임시화장실 설치 민원처리 요청

○ 책임감리단 올대감21-369(2021.12.30.) : 관계기관 요청사항 설계반영 실정보고

○ 공사계약 일반조건(제6절 1항, 설계변경)

- 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

Ⅱ		사업 개요

◦ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

◦ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

◦ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

◦ 공 정 율 : 82.0%

Ⅲ		검토내용

◦ 관계기관(송파구) 민원요지

- ***************************************************************************

- **************************************

********************************************************************************************************

◦ **************

- ******************************************************************************** *************************

- 휀스설치계획

⦁ 휀스종류 : 메쉬휀스

⦁ 설치높이 : H=2.0m

⦁ 설치연장 : L=30.0m(15경간)

***********************************

◦ ******************

- ***********************************************************************************************

- 임시화장실 설치계획

⦁ 화장실종류 : 포세식화장실

⦁ 설치규격   : 2.0 × 1.3(1조식)

⦁ 사용기간   : 약1개월[족구장 신규화장실 설치전까지]

***********************************

◦ 공사비 증.감 현황

- ********************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		감리단 검토의견

○ ****************************************************************************

Ⅴ		조치계획

○ ****************************************** ***************************************************************************************

붙임  1. 책임건설사업관리기술자 검토 보고서 1부

2. 송파구청 공문 1부.  끝.