문서번호	물순환정책과-3059
결재일자	2021. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
김영희	오승민	김재겸		02/10 최진석
협 조

『물순환 회복 기본계획 수립 용역』 준공기한 연기 보고

2021. 2.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『물순환 회복 기본계획 수립 용역』 준공기한 연기 보고

『물순환 회복 기본계획 수립 용역』수행 중 3차년도 과업의 준공기한 연기사유가 발생하여 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

1		용역 개요

❍ 용 역 명 : 서울특별시 물순환 회복 기본계획 수립 용역

❍ 용역기간 : 2018.10.11. ~ 2021.2.28.

- 금회(3차) : 2020.07.01. ~ 2021.2.28

❍ 사 업 비 : 881,390천원 (1차 300, 2차 300, 3차 281)

○ 수행업체 : ㈜동해종합기술공사+㈜제일엔지니어링, (재)서울기술연구원

❍ 과업 주요내용(전체과업)

- 서울시 물순환 관련 계획·제도 및 정책 환경 분석, 성과평가

- 물순환 회복 기본방향 및 지표설정, 물순환 관리체계 및 분야별 관리계획

- 물순환 정책방향 제안 및 사업시행계획 수립 등

2		추진 경과

❍ ´18.10.11. : 용역 계약 및 착수

❍ ´18.12.17. : 용역 착수보고 및 외부전문가 자문

❍ ´19. 6.17. : 행정2부시장 용역보고 및 외부전문가 자문

❍ ´19. 8.30. : 1차 용역 준공

❍ ´19.12.10. : 물순환시민위원회 자문

❍ ´20.06.30. : 2차 용역 준공

❍ ´20.08.24. : 용역 중간보고

❍ ´20.10.19. : 용역 중간보고

❍ ´20.12.23. : 물순환시민위원회 자문

3		준공기한 연기

❍ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	´18.10.11. ~´21.2.28.	´18.10.11.~´21.6.30.
장기3차	´20. 7. 1. ~´21.2.28.	´20. 7. 1. ~´21.6.30.	금 회

***************************

*************************

*****************

**************************************************************************************************************************************

4		행정 사항

❍ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰(재무과)

붙임 : 과업기간 연기 합의각서 1부.  끝.