문서번호	도시철도사업부-11660
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
정광욱		최문기	12/31 代최문기
협조

「신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)」

보조감리원 투입 계획 변경 승인 검토 보고

2021.  12.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

「신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)」

보조감리원 투입 계획 변경 승인 검토 보고

신림선(3공구) 전면책임감리용역과 관련하여 감리사에서 제출한 보조감리원(감리사보) 투입 계획 변경 승인 요청건에 대한 검토보고 임

*************************************************************

관련근거

❍ 입찰안내서 제3장 기술용역계약 특수조건 제29조(감리원의 배치 및 교체)

❍ 건설기술 진흥법 시행령 제27조(건설기술용역의 실적 통보 및 공개 등)

계약현황

❍ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

❍ 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 외 2개사

❍ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	계약일	계약기간	계약금액
총 괄	2011.10.25	2011.11.01 ~ 2022.06.28	3,680,000
6차	2021.12.08	2021.04.25 ~ 2022.06.28	814,960

감리원 투입 승인 요청 현황

❍ 감리원 투입계획 및 현황(총괄)

구 분		2016년			2017년					2018년					2019년				2020년						2021년				2022년			투입기간	투입여부
		09월			6월		12월			6월		12월			6월		12월		6월				12월		6월		12월		6월
,토 목	책임감리원 정희용 (수석감리사)	9/8																											6/28			‘16.09.08 ~‘22.06.28	투입완료
	보조감리원 이교형 (감리사)	9/8																											6/28			‘16.09.08 ~‘22.06.28	투입완료
	보조감리원 (감리사보)											9/11															9/10					‘18.09.11 ~‘21.09.10	철 수
	보조감리원 최형인 (감리사보)						10/16																						3/7			‘17.10.16 ~‘22.03.07	투입완료 (투입계획 변경대상)
	보조감리원 이송달 (감리사보)																		2/10								12/31					‘20.02.10 ~‘21.12.30*
																											**
건축	보조감리원 김종헌 (감리사)																		5/8										3/7			‘20.05.08 ~’22.03.07	투입완료

******************************************************

❍ 교체투입 사유

- ㈜동일기술공사의 타 사업 입찰 관련 감리원 활용으로 인한 변경

❍ 감리원 투입 계획 변경 요청 현황

구 분			2017년				2018년				2019년				2020년				2021년				2022년		투입기간	감리원수 (인·월)	증감
			6월		12월		6월		12월		6월		12월		6월		12월		6월		12월		6월
토목	보조감리원 최형인 (감리사보)	당초			10/16																		3/7		‘17.10.16 ~ ‘22.03.07. (52.93개월)	41.99	감) 1.89
		변경			10/16																12/31				‘17.10.16 ~ ‘21.12.31. (50.50개월)	40.10
	보조감리원 이송달 (감리사보)	당초													2/10						12/31				‘20.02.10 ~ ‘21.12.31. (21.68개월)	17.21	증) 1.89
		변경													2/10								3/7		‘20.02.10 ~ ‘22.03.07. (24.11개월)	19.10
																					**

조치계획

❍ 효율적인 과업 수행을 위한 감리원 투입 계획 변경에 따라 상기와 같이 감리원 배치계획을 승인코자 함.

붙임 : 감리원 투입 계획 변경 승인 요청 공문. 1부.  끝.