(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명	별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사
공사개요	· 위 치 :강동구 암사동 ~구리시 토평동(BN2정거장 전단) · 규 모 :본선4.615㎞, 1개역(BN1) · 공사기간 :********************* (1차 :*********************) · 도 급 비 : *************원 (1차 : *************원)	· 시공사 : 한진영상정보㈜, 쿠도커뮤니케이션(주) · 감리단 : 문엔지니어링(주) · 설계사 : 문엔지니어링(주)
실정보고 건명	별내선(8호선연장) 서울교통공사~암사역간 본선 광케이블 공사 실정보고 (별내선시감 제21-297호,‘21.12.08)
실정보고 사유	‘서울교통공사 ~ 암사역간 광케이블 포설공사’ 관련 - 천호역 및 서울교통공사 천정구간 마감재 구조상 천정공사가 불가하여 당초 설계된 광케이블 통신관로용 후강전선관을 1종금속제가요전선관으로 변경설치 서울교통공사 인입구간 덕트 및 악세스플로어가 설치되어 있어 후강전선관 설치 불가로 1종금속제가요전선관으로 변경설치
감리원 검토의견	- 현장여건 상 후강전선관 시공이 불가하여, 1종금속제 가요전선관(난연후렉시블)으로 변경 시공이 적정한 것으로 판단됨 설계변경은 1차 준공시 총차 물량증감 정산과 병행 시행하는 것이 타당하다고 판단됨
공기에 미치는 영향	해당없음

변경(안)

- 변동물량 및 공사비 증감 내역

품 명	규 격	단위	수량			금액(원)
			당초	변경	증감	당초	변경	증감
************* *********************						***********	************	***********
*********	*************************	*	*******	*******	**	************	************	**
*********	**********	***	****	****	**	**********	**********	**
*********	***	**	***	***	**	**********	**********	**
*********	***********	***	****	****	**	**********	**********	**
*********	************	***	**	**	**	**********	**********	**
********	**********	*	**	**	**	**********	**********	**
*****	************ ********	*	****	****	**	********	********	**
******	*******	**	**	**	**	********	********	**
********	***********	*	***	**	****	**********	**	***********
********	***********	*	****	**	*****	**********	**	***********
*******	****************	*	***	**	****	**********	**	***********
******	****	*	***	**	****	******	**	*******
******	****	*	****	**	*****	*******	**	********
****** ********	*********	*	**	****	****	**	*********	**********

․ 변경내용 : 강제전선관 삭제(아연도28mm 38mm), 1종금속제가요전선관 신설[28mm(비방수)]

※ 1종금속제 가요전선관 신설단가는 28mm비방수 기 계약단가 적용

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

승인 통보 후 설계변경 시행

발주처

검토의견

실정보고에 대한 감리원 검토내용이 적정하므로 선 시공하고 설계변경추진 하고자함

비 고

결재

주무관

유홍근

정보통신과장

김이곤

도시철도설비부장

01/04

김중영

협조

붙임 : 별내선(8호선연장) 서울교통공사~암사역간 본선 광케이블 공사 실정보고 1부. 끝.