문서번호	공원녹지과-158
결재일자	2022.1.4.
공개여부	부분공개(5)

주무관	공원기획담당		공원녹지과장	도시관리국장
김남주	김성기		김경욱	01/04 이창구
협 조 자

2022년 북한산근린공원 조성사업 추진계획

2022. 1.

도시관리국

공원녹지과

2022년 북한산근린공원 조성사업 추진계획

도시계획시설 공원으로 결정된 후, 사업이 시행되지 못한 북한산근린공원 미집행 공원용지에 대하여 보상을 완료하고, 공원조성사업을 시행하여 지역주민들의 쾌적한 공원 환경을 제공코자 함

Ⅰ		사업개요

위    치 : 정릉동 산1-382 (북한산근린공원, 19지구)

규    모 : 941㎡

사업기간 : 2022. 1. ∼ 11.

사업내용 : 지장물 철거, 수목 및 초화류 식재 등

사 업 비 : 300백만원(시비, 조성비)

	< 보상 추진 개요 >
○ 사업의 종류 및 명칭 - 사업의 종류 : 도시계획시설(공원) 조성사업 - 사업의 명칭 : 2020 북한산도시자연공원조성 ○ 위 치 : 성북구 정릉동 산1-382 ○ 규 모 : 토지 1필지(941㎡), 건물 2동 ○ 사업기간 : 2020. 5.14. ~ 2022. 5.13. ○ 사 업 비 : ****************** ○ 주요 추진현황 - 2020. 1.22. : 보상 추진계획 수립 - 2020. 5.14. : 실시계획인가 고시(성북구고시 제2020-70호) - 2020. 8.13. : 실시계획인가 변경 고시(성북구고시 제2020-147호) - 2020. 9.24. : 보상계획공고(성북구공고 제2020-1224호) - 2021. 3. 8. : ************************** - 2021.11.11. : ********************************* - 2021.12.24. : *************

Ⅱ		추진계획

추진방법

설계시행 : 조경설계 전문업체에 의뢰

공사시행 : 지역제한경쟁, 전자공개수의 등

예산과목 : 공원조성과, 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 북한산근린공원(성북) 조성, 시설비및부대비, 시설비(시비)

Ⅲ		추진일정

2022. 1. ~ 2. : 추진계획 수립 및 설계용역 발주

2022. 2. ∼ 6. : 실시설계 및 市 설계심의

2022. 7. ∼ 11. : 공사 시행 및 준공

Ⅳ		사업효과

장기미집행 해소를 통하여 공원 실효시 예상되는 난개발 사전 방지

공원 조성으로 지역주민들에게 쾌적한 여가 및 휴식공간 제공

붙 임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.