문서번호	박물관과-205
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		박물관정책팀장	박물관과장
남광연		김득삼	01/06 김경미
협조

「삼청각 일화당 등 시설 보수공사」

설계변경 및 준공정산 검토보고

2022. 1.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 일화당 등 시설 보수공사」

설계변경 및 준공정산 검토보고

「삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사」의 건축·기계 분야에 대하여 설계변경 및  준공정산 검토 요청이 접수 되어 이에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 삼청각 일화당 시설 보수공사(건축, 기계, 조경)

○ 공 사 비 : ***********

○ 공사기간 : ************************

○ 시공자/감리자 : ㈜마노종합건설 외2 / ㈜에이아이앤 건축사사무소

<사업개요>

❍ 사 업 명 : 삼청각 리모델링 사업

❍ 총사업비 : ********

************************************************************

***************************************************************

*********************************************************************************************************

□ 추진 경위

○ ’21. 4. 27    : 삼청각 일화당 등 시설 보수공사 착공

○ ’21. 9.       : 공연장 시설 개선에 따른 설계변경

○ ’22. 1.(현재) : 내부 마감공사 진행 중

□ 설계변경 내용

○ 관련근거

- 지방계약법 예규(행안부 제114호, 2020. 6.10.)  공사계약 일반조건 제6절

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 관련문서

- 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사 실정보고 및 준공정산 검토요청 건

(MANO건 제*******11호 , 2022. 1. 5.)

○ 설계변경 사유

- 직접공사비 변경 : 현장여건에 따른 보수공사 범위 변경에 따른 실시공 물량 반영

- 주휴수당 변경 : 지급내역 반영하여 실비 정산 금액 반영

- 경비 변경 : 안전관리비, 건강․연금보험료, 퇴직공제부금 등 경비 실비 정산

○ 건축·기계 공사비 변경 내용   ※ 세부내용 [붙임] 참조

(단위: 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 · 감	비 고
*****		************	***********	**************	** **
****		**********	**********	**************	** **
*******		***********	**********	**************
	*****	**********	*********	**************
	*********	*********	*******	**************
	*****	**********	*********	**************
	*******	**********	**********	**************
	*********	**********	**********	**************
	*******	*********	*********	*************
	********	*******	**	*************
	*********	*******	**	*************
*********		***********	***********	**************
********		*************	*************	**************

□ 계약변경 내용

구 분	업 체 명	계 약 금 액
		변경 전	변경 후	증 · 감
******* ******	*******	**************	**************	***************
**** *******	*****	************	************	*
**** *******	*******	************	************	*
********		**************	**************	***************

□ 설계자 검토의견

○ 기존 시설물의 노후화와 오염이 심하여 전체 인테리어 공사의 완성도와 이미지 조화를 위해 마감재 물량증가가 불가피하였고, 일화당 홀과 공연장의 통일성과 완성도를 위해 전체 공사비 내에서 일부 물량 변경 시공이 타당함

□ 감리자 검토의견

○ 현장여건에 따른 변경사항 등으로 인해 보수 공사 수량이 증가되었으며, 수량, 단가 검토결과 이상없이 반영됨

○ 삼청각 일화당 등 시설 보수공사 준공정산 설계변경 내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨

□ 처리의견

○ 본 공사 감리자의 기술의견 사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 삼청각 일화당 등 시설 보수공사에 대한 설계변경을 승인하고, 재무과에 계약변경을 의뢰하고자 함

붙 임   1. 설계변경 내역서 1부.

2. 실정보고 및 준공정산 검토보고 1부.  끝.