문서번호	물순환정책과-370
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		물순환시설팀장	물순환정책과장
하록		김서연	01/06 김재겸
협조

2021년 빗물관리시설 확충사업 결과보고

2022. 1.

물순환정책과

2021년 빗물관리시설 확충사업 결과보고

물순환 시설을 확충하여 왜곡된 물순환 회복에 기여하고자 시행한「2021년 빗물관리시설 확충사업」의 추진 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

○ 위    치 : 빗물관리시설 확충사업 선정 대상지 (14개소)

○ 기    간 : 2021.02. ~ 2021.12.

○ 사 업 비 : 2,792백만원(시설비 2,400, 자치단체 보조 392)

- 시설비 : 사업비의 100% 지원

- 자치단체자본보조비: 사업비의 50% 지원(자치구 50% 확보)

○ 사업내용 : 빗물관리시설 확충을 위한 공공기관 예산지원

Ⅱ		추진경위

○ ’20.11. : 빗물관리시설 확충사업(자치단체자본보조) 공고

- 신청 : 5개 자치구 10개사업 신청 / 신청액 : 690백만원

○ ’20.12~’21.1. : 대상지 선정을 위한 현장조사 및 선정심사(자치단체자본보조)

- 선정 : 3개 자치구 4개사업 선정 / 사업비 : 392백만원

○ ’21.01. : 빗물관리시설 확충사업(시설비) 추진계획 수립 및 공고

- 신청 : 11개 자치구 18개사업 신청 / 신청액 : 6.029백만원

○ ’21.02. : 대상지 선정을 위한 현장조사 및 선정심사(시설비)

- 선정 : 9개 자치구 10개사업 선정 / 사업비 : 2.400백만원

○ ’21.04~09. : 외부전문가를 통한 대상지별 설계자문(서면실시)

○ ’21.05~12. : 공사시행(사업부서)

○ ’21.11. ~ 12. : 시·구 합동 현장점검(서울시, 사업부서)

○ ’21.12. : 정산보고(사업부서 → 서울시)

Ⅲ		추진현황

□ 사업비 집행현황

○ 총사업비 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	’21 본예산	집행액	’22 사고이월	집행잔액
시설비 (시비100%)	*********	********* ***********	******* **********	*******
자치단체 자본보조 (시비50%)	*******	*******	*	*****

○ 시설비 사업 설치내역 및 집행현황

(단위 : 백만원)

연번	자치구	설치 위치	사업내용	배정액	집행액	집행잔액
				*****	*****	***
1	강동구	천호1동 일대	침투트렌치, 투수블록 등	***	***	**
2	성북구	한천로526일대	투수블록,가로수보호대, 띠녹지, 빗물정원, 침투형 빗물받이	***	***	**
3	마포구	마포대로11길	띠녹지조성, 집수경계블록	***	***	**
4	서초구	양재동 232~232-4	투수블록,띠녹지, 침투저류조	***	***	**
5	용산구	청파로 195~청파로241 서빙고로413~서빙고로417	집수경계블록	***	***	*
6	성북구	보문로147~보문로37길1	띠녹지,투수블록,침투트렌치	***	***	*
7	성동구	광나루로278~334	띠녹지 정비	**	**	*
8	종로구	지봉로 일대	집수경계블록	***	***	*
9	서대문구	북아현동1013-1	빗물정원 조성	***	** ***** *******	*
10	강서구	양천로 507~543 일대	투수블록,집수경계블록, 침투측구	***	***	*

○ 자치단체자본보조 사업 설치내역 및 집행현황

(단위 : 백만원)

연번	자치구	설치 위치	사업내용	배정액	집행액	집행잔액
				***	***	*
1	동대문구	장안동 삼거리	침투트렌치	**	**	*
2	성북구	삼선동3가 1-1	띠녹지 ,투수블록 침투형 빗물받이	***	**	*
3	서초구	강남대로61길 13	빗물정원	**	**	*
4	서초구	사평대로12∼18외 1	투수블록 , 띠녹지	***	***	*

□ 빗물관리시설 설치현황

○ 유형별 설치개소 현황

< 단위 : 개소 >

합 계	투수성 포장	빗물정원	띠녹지	트렌치·측구	침투통	침투형 빗물받이	집수경계블록
90	7	2	5	4	27	36	9

○ 설치전후 현장사진

구분	투수성포장(강동구)	투수성포장 및 띠녹지(성북구)	띠녹지 조성(마포구)
설치전
설치후

Ⅳ		현황분석

□ 사업성과 분석

○ 설계자문 강화를 통해(설계 전·중, 조치계획서)를 통해 빗물관리기능 강화

○ 단순 블록 교체가 아닌 여러가지 빗물관리시설을 설치함으로써 사업의 다양화 확보

○ 현장점검 결과 대부분 시설물 시공 상태가 양호하였지만 일부 미흡한 부분에 대해 조치 요청

□ 개선사항

○ 각 물순환 시설물간의 기능연계를 통해 사업대상지의 빗물관리기능 확대 필요

○ 시설물 모니터링을 통한 시설별 성과분석 예정(~’22.12월)

(물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리체계 구축용역)

Ⅴ		향후 계획

○ ’22.01.~   : '22년도 빗물관리시설 확충 사업 진행

○ ’22.02.     : '21년도 보조사업비 정산에 따른 반납금액 고지

붙임 : ’21년 사업지 빗물관리시설 설치 현장사진 1부.  끝.