문서번호	급수운영과-438
결재일자	2022. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
최성태	임인택	김종원	01/10 김명용
협 조
	시설관리과장		이규희
	시설운영팀장		송종학
	기전팀장		함태광
	주무관		한호진
	급수관리팀장		양재덕

2022년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

2022. 1.

강동수도사업소

2022년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

누수, 수질사고 등 비상 상황 대비 블록시스템과 정수센터 간 공급망, 주요관로 이중화 등을 위한 안정적 급수 체계를 구축 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

○ 2040 서울수도정비기본계획(환경부 승인, 2021.12.7)

○ 무단수 급수체계 구축사업 추진계획(배수과-8030, 2019.7.19)

○ 2022년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획(배수과-226, 2022.1. 7)

Ⅱ		2022년 추진계획

□ 추진개요

○ 정비목표 : 0.15㎞(관로부설 0.15㎞, 유량계 설치 3개소)

○ 총사업비 : 2,330백만원

○ 사업내용

- 노량진 배수지 송수관로 이중화를 위한 관로 연결공사 및 밸브 설치

- 길동중블록 세분화(3중블록 구축)를 위한 신설 유량계 설치

○ 사업별 추진개요

(단위:㎞, 백만원)

구 분		계	송파구	강동구
계	부설연장	0.15	0.1	0.05
	사 업 비	2,330	2,000	330
송수관로 이중화	부설연장	0.1	0.1	-
	사 업 비	2,000	2,000	-
유량계 설치	부설연장	0.05	-	0.05
	설치개소	3	-	3
	사 업 비	330	-	330

○ 세부 추진계획

- 송수관로 이중화 : 단위공사 1건 / 0.1㎞ / ********

구 분	공 사 명	구경(㎜)	연장(㎞)	사업비(백만원)	사업기간
송수관로 이중화 (급수운영과)	노량진 배수지 송수관로 이중화 구축공사	1,200	0.1	*****	’22.3~6.

- 유량계 설치 : 단가계약 / 유량계 3개소, 관부설  50m /*******

구 분	공 사 명	구경(㎜)	공사개요		사업비(백만원)	사업기간
			유량계 설치	관로부설
유량계 설치 (시설관리과)	강동구 성내동 64-13	800	1개소	-	**	’22.3~6.
	강동구 성내동 379-32	700	1개소	-	**	’22.3~6.
	강동구 둔촌동 436	600 400	1개소	40m	***	’22.3~6.
	강동구 성내동 451-1	500	-	10m	**	’22.3~6.

□ 추진일정

○ 송수관로 이중화(단위공사)

구분	추진계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	도면 및 설계 심사
2	유관기관 협의 및 도로굴착 승인
3	공사발주, 관급자재 구매
4	공사계약 및 착공(시행)
5	공사준공

○ 유량계 설치(단가계약)

구분	추진계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	도면 및 설계 심사
2	도로굴착 승인
3	관급자재 구매
4	공사착공(시행)
5	공사준공

※ 유량계실 및 관로공사는 지역담당팀, 유량계 설치는 기전팀에서 시행

Ⅲ		행 정 사 항

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 사전절차 이행 등 단계별 관리를 통한 사업 조기 완료 추진

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 기간 최소화

- 도로굴착 승인 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 중대재해 처벌법 관련 안전관리 강화 추진

- 자재, 품질, 안전 등 공사장 관리 실태 자체 순회 점검 실시 - 수시

○ 추진실적 보고: 본부 배수과 매월 5일 까지

붙임  1. 본부 방침서 1부

2. 2022년 상수도 블록시스템 공급체계 구축 사업 현황 1부. 끝.