문서번호	공원시설과-148
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
이경원	양돈욱	김상국		01/11 윤종장
협 조

2022년 한강공원 수영장 보수공사 추진 계획

2022. 1.

한강사업본부

(공 원 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 한강공원 수영장 보수공사 추진 계획

한강공원 야외수영장 및 물놀이장을 이용하는 시민의 안전확보 및 쾌적한 물놀이공간 조성을 위한 2022년 보수공사 추진 계획임.

□ 시설현황

○ 수영장 : 6개소,  물놀이장 : 2개소

구 분	수 영 장						물놀이장
	뚝섬	광나루	잠실	잠원	여의도	망원	난지	양화
면 적(㎡)	21,000	9,630	27,945	23,325	20,000	22,293	7,040	7,800
수조면적(㎡)	4,640	1,806	5,102	4,800	5,200	5,300	3,500	1,700
수 조 수	4	2	3	3	4	3	1	1
수용인원(명)	3,500	1,200	3,400	3,000	3,600	3,300	1,100	600
조 성 년 월	2009.7	1991.8	1990.8	1989.8	2009.7	1991.8	2009.7	2015.4

□ 공사 개요

○ 공사대상 : 수영장 4개소(뚝섬, 광나루, 잠원,여의도), 물놀이장 2개소(양화, 난지)

- 잠실 : 자연형 물놀이장 조성공사 시행(2023.6. 준공 예정)

- 망원 : 성산대교 성능개선공사(2018.~2025.12.) 이후 개장 예정

구 분		공사물량	공사비(천원)
계			*********
수영장 보수공사	소계	*********	*********
	토목분야	*********************** ****************************** ********************************** ******************************************************** *********************************** *********************************************** ******************************	*******
	기전분야	***************************** ******************************** *************************** ********************	*******
폐기물 처리 용역		***********************	******

□ 세부 추진 계획

보수공사 대상 공정이 매년 반복공정으로 기존 설계자료 활용이 가능하고, 신속한 공사추진 및 예산절감을 위해 자체설계 후 공사 시행

보 수 공 사

○ 공 사 비 : ***********

○ 공사기간 : 착공일로부터 2022.11.30.까지

- 수영장 개장 전 주요공정 완료, 운영기간 동안 유지관리 시행

○ 시행방법 : 효율적 사업관리를 위해 일괄 발주

○ 발주방법 : 주계약자 공동도급에 의한 경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 토목공사업(종합) + 기계설비공사업(전문)

폐기물 처리용역

○ 용 역 비 : ***********

○ 용역기간 : 착수일로부터 2022.11.30까지

○ 시행방법 : 수의계약

- 금액이 소액으로 지방계약법에 따라 최저견적 업체와 수의계약

□ 향후 추진일정

○ ’22. 1. : 계약심사

○ ’22. 1. : 공종분리 검증위원회 검증

○ ’22. 2 ~ 6. : 공사발주 및 주요공정 완료

○ ’22. 6. ~ 8. : 수영장 개장 기간 유지관리

○ ’22. 11. 30. : 공사 준공.

붙임: 1. 2022년 한강공원 야외수영장 보수내역 1부.

2. 뚝섬 유수풀 여과기 교체 계획.  끝.