문서번호	시설과-105
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
유경희	이종무	권종화	01/11 김인숙
협 조

용산가족공원 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2022. 1.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

용산가족공원 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

교통약자를 포함한 모든 시민들이 편하고 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 장애요소 최소화 및 안전한 환경으로 개선하고자 용산가족공원에 무장애 친화공원 조성사업을 추진코자 함.

□ 추진근거

❍ 2022년 무장애 친화공원 조성사업 추진계획 알림〔공원녹지정책과-212(2022. 1. 6)호〕

□ 추진방향

❍ 무장애 친화공원 기본계획 및 가이드라인, 유니버설 디자인 기준 준수

❍ 장애인, 전문가, 이용객 등 각계각층 다양한 의견을 수렴하여 설계에 반영

❍ 교통약자를 위한 편의시설 보완과 공원 노후 위험시설 정비 병행

□ 사업개요

❍ 위    치 : 용산가족공원(용산구 서빙고로 137 일대)

구 분	세 부 내 용	비 고
주요시설	공원관리사무소, 공원주차장, 연못, 잔디광장, 어린이놀이터 등
주 요 개선사항	************************************* ******************************************** ***************************************** ********************** *********************************************

❍ 사업내용 : 접근성 개선, 편의성 증진, 이용성 도모, 안전성 개선 등     ※ 설계 중 전문가 현장 자문 등을 통해 사업비 범위 내에서 정비내역 추가 및 대상지 발굴

❍ 사업기간 : 2022. 01. ~ 09.

❍ 사 업 비 : ************************************

***************************

☞ 설계용역비는 설계용역 타당성 심사 전 금액임

❍ 예산과목 : 무장애 친화공원조성, 시설비및부대비, 시설비(재배정사업)

□ 시행방법

❍ 설계용역 : 1인견적 수의계약

***************************************************************

❍ 공사시행 : (지역제한)경쟁입찰

□ 추진계획

❍ 2022. 1월.          : 설계용역 발주(설계용역 타당성 심사)

❍ 2022. 1월. ~ 3월.  : 설계 시행(설계심의 등)

❍ 2022. 4월.          : 공사발주(市 재무과 계약공고 의뢰)

❍ 2022. 4월. ~ 9월.  : 공사시행(착공 및 준공)

≪ 주 요 현 황 사 진 ≫

단차로 휠체어·유모차 진입 불가능	공원 주출입부 점자블럭 설치 오류

≪ 기본계획(안) ≫

정비사업 대상지(용산가족공원)

붙임  1. 설계용역비 산출내역서 1부

2. 주요 정비내용 1부

3. 사업추진 방침서(서울시) 1부.   끝.