문서번호	하천관리과-479
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사무관	하천관리과장
박철호		김영진	01/11 손경철
협조
	주무관		민병훈

하천점용허가 변경신청에 따른 검토보고

2022. 1.

하천관리과

하천점용허가 변경신청에 따른 검토보고

청계천 하천점용허가 변경신청(2021년 청계천 차집관로(우안) 물막이공사) 에 대한 검토보고 임.

Ⅰ		점용허가 신청개요

▢ 신   청   인  : 중랑물재생센터 소장

▢ 하천 점용기간

당초 : 2021.10. 15.~ 2021.12.31.

변경 : 2021.10. 15.~ 2022.06.30.

▢ 하천점용 개요

○ 점용목적 : 2021년 청계천 차집관로(우안) 물막이 공사

- 차집관로 내부 정밀안전진단 및 단면보수 공사

○ 점용위치 : 청계천 제2마장교 ~사근IC진입부(약 528m)

- 위치도

Ⅱ		검 토 의 견

▢ 점용 위치는 청계천 제2마장교에서 사근IC진입부 까지이며, 차집관로 물돌리기후 정밀안전진단 및 단면보수를 시행하는 공사임

▢ 당초 ’21.10.15.~ ’21.12.31.까지 하천점용을 허가하였으나, 기간내 공사를 끝내지 못해 ’22.6.30까지 하천점용허가를 연장신청하였음.

▢ 다만, 수방기간을 감안하여 ’22.5.30까지 하천점용 허가하고   차집관거 공사는 ’22.5.15. 이전까지 완료토록 통보코자 함

▢ 또한, 우천시 공사중지, 자재 및 장비 이동 등을 조건으로 점용허가  처리하고자 함

Ⅲ		행 정 사 항

▢ 서울시설공단 및 신청인에게 점용허가 통보.

▢ 점용료 : 면제(하천법 제37조 ⑤항)

붙임. 1. 하천점용허가증. 1부.

2. 하천점용 허가조건. 1부.

3. 하천점용허가 변경신청서(2021 청계천 차집관로(우안)

물막이공사) 1부.  끝.