투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	신호처, 토목처, 토목사업소, 전기2사업소, 고덕차량사업소
제목	하남선 입출고선 점검결과 지적사항 조치에 따른 협조 요청

1. 도시철도설비부-11083(2021.12.2.)호와 관련입니다.

2. 하남선 입출고선 사전점검 결과 지적사항에 대한 보강작업을 위하여 아래와  같이 작업계획을 제출하오니, 시설물검증시험이 차질 없이 실시될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 작업계획

- 작업위치: 하남선 입출고선(신설) 토공구간

- 작업구간: 18m(입출고선 0km220m ~ 0km238m)

- 보강방법: 옹벽 인접부 천공 후 충진재 주입

- 투입장비: 천공기, 주입기, 발전기 등

- 작업기간: 2022.1.13. ~ 1.16일(4일, 야간작업)

나. 협조 요청사항

구 분	협 조 사 항	비 고
신 호 처	입출고선(신설) 토공구간 옹벽 보강 시행 관련 소관사항
토 목 처	입출고선(신설) 토공구간 옹벽 보강 시행 관련 소관사항
토목사업소	사전점검시 보완요구 관련 사항 등
전기2사업소	입출고선 급전 등 소관 사항
고덕차량사업소	차량기지내 작업자 및 장비(소형) 출입 등 소관사항

붙임  1) 작업계획서 및 업무지원요청서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안상훈		토목1과장	허동		도시철도토목부장	전결 01/11 최병훈
협조자
시행	도시철도토목부-374	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화	027727211	/전송	02)772-7306	/	aasshh902@seoul.go.kr	/	부분공개(5)