문서번호	간호1과-342
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
행정팀장	간호1과장	간호부장		서북병원장
김민욱	천선옥	정남숙		01/11 박찬병
협 조
	진료부장		심재천
	원무과장		김용범
	간호2과장		민선정

-스프링클러 공사 관련- 17병동 이전 및 환자 전동 계획

2022. 1.

서북병원

[간 호 부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

-스프링클러 공사 관련-

17병동 이전 및 환자 전동 계획

스크링클러 시설 공사 대상인 동관 7층의 원활한 공사 진행을 위해 17병동을 이전하여 환자안전관리 등 병동운영에 최선을 다하고자 함.

1		추 진 근 거

서북병원 소방스프링클러 설치 추진계획(원무과-10090호, ’21.8.13.)

제5차 T/F 집행회의 결과(17병동 전동가능일 안내)

2		추 진 경 과

2020.09.16.					스크링클러 설치 시행계획
	2021.10.05.~11.19.				스프링클러 설치 공사 및 감리용역 계약
	2021.11.04. ~ 2022.01.06.				스프링클러 설치공사 TF 집행회의 운영(1~5차)
		2021.11.16.			(제2차 TF회의)스프링클러 공사구역별 협의부서 확정
		2021.12.16.			(제3차 TF회의)**************************
		2022.01.06.			(제5차 TF회의)**************************
2021.11.19. ~ 2022.01.21.					16병동 스프링클러 설치 공사
	2022.01.24.				17병동 ⇒ 16병동 이동 및 환자 전동
2022.01.25.~03.18.					17병동 스프링클러 설치 공사(예정)
	2022.03.21.(안)				16병동 ⇒ 17병동 이동 및 환자 전동

※ 동관 7층 공사 완료 시 16병동 ⇒ 17병동 이동 및 환자 전동(공사일정 변동 가능)

3		추 진 개 요

전동일정    (※ 세부일정은 공사상황에 따라 변동 가능)

❍ 1차: (17병동 ⇒ 16병동) 2022. 1. 24.(월)

❍ 2차: (16병동 ⇒ 17병동) 2022. 3. 21.(월) 예정

대 상: 17병동 전체(직원, 환자, 물품 등)

방 법: 스크링클러 공사 일정에 맞춰 동관 6층 ↔ 7층 이동

인 력: ************************************

가동병상: [16병동]*******, [17병동]*********

❍ **********************

병동물품: 의료장비, 비품 및 소모품, 사무용기기 이동

4		세부추진계획

스프링클러 공사 및 전동 일정

2022.1.24.(월) 9시	➠	2022.1.25.(화) ~ 3.18.(금)	➠	2022.3.21.(월) 예정
17병동 → 16병동 전동		16병동 운영 17병동 스프링클러 공사		16병동 → 17병동 전동 (17병동 운영)

전동규모   (※ 기준일: 2022.1.11.)

❍ 환자 현황: 총 26명********************

중증도(1~4군)				낙 상				욕창
계	1군	2군	3군	계	낮음	주의	고위험	계	낮음	위험	고위험
**	**	*	*	**	**	*	**	**	**	*	*

❍ 인력 현황: 총 23명*********************

계	간 호 사					간호보조 인 력 (내 부)	결 핵 안심벨트 (위 탁)
	소계	팀장	6급	7급	8급
**	**	*	*	*	*	*	*

❍ 의료장비 및 비품 현황(‘미이동’, 전동 병동 환자침대･상두대 사용)

- 의료장비 및 비품: ‘이동’하여 사용

․ 정맥수액주입기, 환자감시장치, 산소포화도측정기, 신장체중계 등 ******

․ 혈압계, 체온계, 네블라이저, 산소통, 수액걸이, 휠체어, 카트 등 ********

- 사무용품: ‘일부 이동’하여 사용

․ 옷장, 캐비넷, 책상, 의자 *******

- 전산장비: ‘이동’하여 사용

․ 컴퓨터(모니터포함) **, 프린터기 **, 태블릿 PC **

- 소모품 및 린넨류: ‘이동’하여 사용

․ 일회용 주사기, 각종 소독액, 드레싱 용품, 손소독제 등****

․ 린넨류: 환의, 시트커버, 패드, 베갯잇, 이불 등 **

□ 병상 현황: [16병동] ******* ⟺ [17병동] ********

❍ 가동병상                                           (단위: 실/병상)

구 분		허가	가동	특수병실		일반병실		(공동간병실 등) 5인실
				격리실 (2인실)	집 중* 치료실	2인실	4~6인실
16W	병실수	10	*	-	1	1	6	2(공동간병실)
	병상수	47	**	-	2	2	25	10
17W	병실수	12	**	2	1	-	6	2(공동간병실)
	병상수	51	**	4	1	-	30	10

※ 집중치료실: 가동병상에서 제외

❍ 병실배치                                             (단위: 병상)

16 병 동 ****	호실	병상	특 징	호실	병상	특 징
	1601	***	*****	1607	*	*******
	1602	***	******	1608	*
	1603	*	********	1609	*	**********
	1604	*	*******	1610	*	*******
	1605	*	*******	1611	*	*******
	1606	*	*******	1612	*	**************

17 병 동 ****	호실	병상	특 징	호실	병상	특 징
	1701	***	*****	1707	*
	1702	*	********	1708	*
	1703	*	********	1709	*
	1704	*	*******	1710	*	*****
	1705	*		1711	*
	1706	*		1712	*	**********

❍ ****************: 코로나 병동 시설 존치

- ************************************

- 기존 동관 처치실(1개실) 병실 사용 불가

※ 16･17병동 호흡재활실 설치(5인실)

□ 병동배치도

16병동	17병동

※ ********************

5		행정사항

진료부

❍ 주치의: (1차)17병동 ↔ 16병동, (2차)16병동 ↔ 17병동 이동 시 결핵환자 배치 및 전동처방

❍ 의료지원과(재활의학과): 호흡재활실 장비 및 비품 등 이동

원무과

❍ 서무팀: 환자 이송 관련 사회복무요원 지원

❍ 시설팀: 건축․전기․기계 등 시설관리, 청소․커튼 등 환경관리,

공용 여자화장실 비닐마감 철거

❍ 원무팀(전산실): EMR 관련 전동 환자 등록 및 간호사 이동 처리

끝.