문서번호	건축부-601
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		정채문	01/12 신명승
협조

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

관급자재(알루미늄창호) 구매계획 검토보고

2022. 01.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

관급자재(알루미늄창호) 구매계획 검토보고

본 사업의 알루미늄창호, 유리공사 계획공정을 고려한 원활한 추진을 위하여 관급자재를 적기에 구매할 수 있도록 계획을 수립하고 보고드림

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사

❍ 위    치 : 서울시 성동구 아차산로17길 9(성수동2가)

❍ 규    모 : 지하2층~지상7층, 연면적 2,711.05㎡

❍ 총사업비 : ********************************

❍ 공사기간 : 2020.06.30.~2022.06.30.

❍ 설 계 사 : SOA건축사사무소㈜

❍ 감 리 사 : ㈜포스코에이엔씨건축사사무소 외 1개사

❍ 시 공 사 : 세이브건설㈜ 외 2개사

❍ 현 공 정 : 지상7층 골조공사 진행중 (공정률 66%)

2		추진경과

❍ '18.06.20. : 광역소공인 특화지원센터 건립 계획 수립

❍ '19.03.21. : 설계용역 추진 의뢰 (경제정책실 제조산업혁신과→건축부)

❍ '19.05.15. : 설계용역 착수

❍ '20.02.23. : 설계용역 준공

❍ '20.06.19. : 건설사업관리용역 착수

❍ '20.06.30. : 공사 계약 및 착수

❍ '21.09.06. : 1차수 공사 준공

❍ '22.01.현재 : 지상7층 골조공사 진행중

3		관급자재 구매계획

□ 관련규정

❍ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 엄무수행지침 제87조 (사용자재의 적정성 검토)

❍ 조달사업에 관한 법률 제11조 (계약체결의 요청), 동법 시행령 제13조      (다수공급자 계약)

❍ 물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준 (조달청 고시 제2021-05호)

□ 관급자재 현황(설계내용)

***	*******	***	****	*******	*******	***
**** **	******	**	********	******	***********
	*******	**	*****	******	**********
	*********	**	*******	******	**********
	******	**	*******	******	**********
	***	**	****	*****	*******
	******				***********
*****					*********	*****
********					***********

□ 검토내용

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자 2단계 경쟁)

※ 2단계경쟁 대상 : 중소기업자간 경쟁제품으로 1회 납품요구 대상금액 1억 이상

❍ 구매절차

- 1단계 : 수요기관이 평가기준을 결정하여 5개 업체 이상(최소 2개)을 대상으로 제안요청

- 2단계 : 나라장터에서 가격, 품질관리, 사후관리 등 평가하여 최종 계약상대자 선정

❍ 2단계 평가방식 및 배점기준

- 평가방식 : ***********에 따른 평가결과 합산점수가 가장 높은 업체선정

- 평가내용 및 배점기준

**	****	****	**
**************	**	*********	***
	****	******	***
	****	********	**
	****	*********************	***
	***	*************	******
		*******	*****
		****	*****
		**********	*****
		******	***
		******** *****************	*****
		****	***
****			****

- ‘제안가격의 적정성’ 평가방식 : **

****	****	****
*********	********* ******	******************************************

************************************************

*********************         (조달수수료 별도, 부가세 포함, 금액은 업체별 견적기준)

***	***	***	****	*******	**** *******	***
*	**********	**	********	***********	*****	*** ****
*	************	**	*********	***********	*****	*** ****
*	***********	**	*********	***********	*****	*** ****
*	***********	**	*********	***********	*****	*** ****
*	******	**	*********	***********	*****	*** ****

<제안요청 업체 선정기준>
1) MAS일반제품 등록 업체 중 설계내역에 있는 제품을 보유하고 시공이 가능한 업체 5개이상 선정 2) 설계도서에 적용된 동등이상의 AL. BAR 규격(155mm 및 히든바 규격)이상과 유리 28mm 복층유리를 사용하는 제품 3) 개폐창 등록 업체와 일면 로이코팅 유리를 적용한 제품 4) 2~3번을 검토 후 창호성능(열관류율) 상위 5위 업체 선정

4		건설사업관리단 검토의견

*********************

*********************************************************************************************************************************

붙임	관급자설치 관급자재(알루미늄창호) 구매검토보고서 1부.  끝.