문서번호	기전과-350
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		01/12 김형집
협조
	주무관		김선범

『마곡지구(1, 2구역)』

교통안전시설물(신호) 제2차 인수인계 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 01.

강서도로사업소

(기전과)

『마곡지구(1, 2구역)』

교통안전시설물(신호) 제2차 인수인계 검토보고

마곡지구 교통안전시설(신호) 원인자부담공사 제2차 시설물 인수인계 요청건에    대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-9569(2014.04.10.)호 외 22건

기전사업부-152(2022.01.11.)호

대영전기감GE 21C-10-44(2021.10.29.)호

대영전기감GE 21C-12-55(2021.12.21.)호

마곡 도시개발지구 교통신호기 설치·관리 협약(2019.9.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사(1, 2구역)

원 인 자 : 서울주택도시공사

공사기간 : 2014.03.06. ~ 2019.08.15.

공사장소 : 강서구 마곡지구 내부도로

공사개요 : 교통신호기 설치

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	도로교통공단	㈜건영이앤씨	용우이엔씨㈜ 외 1	ㆍ마곡지구 103개 교차로 교통 신호기 설치

관련업체 및 주요설치 내용

※ 시설물 인수인계, 개수 관련 등은 서울주택도시공사 감리용역사인 대영유비텍(주)에서 수행

Ⅲ		진 행 경 과

진행경과

- 2019. 05. 02. : 예비준공검사

- 2019. 07. 22. : 준공검사

- 2019. 08. 13. : 협약체결(마곡 도시개발지구 교통신호기 설치·관리 협약)

- 2019. 08. 14. : 조건부 준공승인통보

- 2020. 09. 24. : 제1차 시설물 인수(103개 교차로 중 72개 교차로 교통안전시설물)

- 2021. 11. 08. : 제2차 시설물 인수인계요청(서울주택도시공사)

- 2021. 12. 20. : 제2차 인수인계요청 교차로 시설물 합동점검(기전과, 원인자, 감리사, 시공사)

- 2021. 12. 21. : 합동점검 지적사항 조치완료보고(감리사)

- 2022. 01. 11. : 제2차 시설물 인수인계 재요청(서울주택도시공사)

제1차 시설물 인수인계 현황                                 (단위 : 교차로)

계			1구역			2구역			비고
계	**	***	*	**	***	*	**	***
103	**	**	**	**	**	**	**	**

제1차 인수인계 제외 사유 및 교차로                          (단위 : 교차로)

구분	계	사유	수량	교차로명
1구역	**	******	*	*****************************
		*******	*	***************
		********	*	***********************
		*******	*	********************
2구역	**	*********	*	***
		*********	*	*******
		********	*	*************
		*******	*	******************************************

Ⅳ		인 수 검 토

계	1차 인수완료	2차 인수	향후 인수(3차)	비고
***	**	*	**

마곡지구 시설물 현황                                      (단위 : 교차로)

제2차 시설물 인수검토 대상                                 (단위 : 교차로)

구분	계	수량	사유	교차로명
1구역	*	*	***************************	**************************
2구역		*		********

구분	계	사유	수량	교차로명
1구역	**	******	*	***************************************
		***********	*	****************************
2구역	**	***********	*	***
		*********	*	*******
		***********	*	***********************************************

제2차 시설물 인수인계 제외(향후 인수) 사유 및 교차로

규제 변경 등에 따른 재공사 내용

- 공 사 명 : 강서로 교통안전시설물 공사 외 2개 공사

- 공사장소 : 강서구 강서로, 양천로, 공항로 13개 교차로

- 공사내용 : 신호기 신·이설, 가로등 통합 및 안전표지 설치

- 원 인 자 : 서울주택도시공사

- 공사기간 : 2020.08.25. ∼ 2022.06.30.

Ⅴ		향 후 계 획

교통안전시설물 제3차 인수인계 추진

- 강서로 교통안전시설물 공사 외 2개 공사 준공 시 제3의 원인자공사(2개소) 및 설치기준         부적정(1개소)를 포함하여 인수인계 추진(2022. 7월)

Ⅵ		행 정 사 항

마곡지구 교통안전시설물 제2차 인수인계 통보(원인자, 감리사, 유관기관)

인수대상 7개 교차로 및 제1차 인수인계 시 명의변경 누락 2개소(#30, I4블럭)

교통신호기 전기 사용자 명의 변경요청(한국전력공사)

※ 2022년 2월 사용분부터 우리사업소에서 전기사용요금 납부 예정

붙임  1. 제2차 인수인계 요청 및 시설물 인수인계서  1부.

2. 제2차 인수인계 대상 교차로 현황도 1부.

3. 제2차 인수 관련 전기사용자 명의변경 대상 목록 1부.

4. 감리사 검토의견서(준공검사 지적사항 조치 결과) 1부.

5. 감리사 검토의견서(제2차 인수인계 합동점검 지적사항 조치결과) 1부.

6. 마곡지구 교통신호기 설치 관리 협약서 1부.  끝.