(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

동부간선도로확장(2공구) 전기공사(10차)

공사개요

· 위    치 : 도봉구 창4동 1-1

· 내    용 : 도봉지하차도 건설 및 확장

· 규    모 : L=3.2km , 4차로 → 6차로

· 공사기간 : ′21.5.4.~′22.1.31.(10차)

· 도 급 비 : 768,252,000원(10차)

· 설계사 : ㈜경화엔지니어링

㈜동림TNS(교통신호기)

· 시공사 : ㈜태경이엘피

· 감리단 : ㈜이산

실정보고 건명

○ 제14회 실정보고

- 교통안전시설물 개선 및 변경 등 규제심의 결과에 따른 설계변경

실정보고 사유

○ 유관기관(서울지방경찰청)의 교통안전시설물 규제심의 결과 반영

- 마들로(녹천교~창동 796) 구간 원인자 복구공사(신호등 설비) 중 유관기관의 교통안전시설물 개선 및 변경 사항에 대한 규제심의 결과를 반영하여 마들로 신호등설비 공사 대상 및 물량 변경 (교차로 7개소 → 5개소)

건설사업관리단

검토의견

○ 마들로 신호등 설비공사(원인자 복구) 구간 내 교통안전시설물 규제심의결과 반영을 위한 실정보고 사항으로 설계도서 및 공사비 산출 내역, 단가적용 검토 결과 적정하다고 판단됨

공기에 미치는 영향

○ 해당사항 없음

변경(안)

○ 주요 변경 내용

- 신호등 설비 변경 및 설계 미반영 내역 추가에 따른 물량 반영

공 종	당 초	변 경	사 유	금액증‧감
신호등 설비공사
마들로(녹천교∼창동796) 원인자 복구공사(신호등설비)	마들로 교차로 7개소 교통신호기 개선	마들로 교차로 5개소 교통신호기 개선, 설계 미반영 내역 추가	교통안전시설물 규제심의 결과 반영	89,208천원

○ 공사비 증·감 내용

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증․감
도급비	***********	***********	**************
관급비	**********	**********	*************
이전비	*	*	*
계	***********	***********	**************

※ 간접비 및 부가가치세, 조달수수료 포함

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

설계변경 계약심사 의뢰(서울시 계약심사과)

설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(총무부)

발주처

검토의견

유관기관(서울지방경찰청)의 교통안전시설물 규제심의 결과를 반영한 실정보고에 대하여 건설사업관리단의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고 추후 설계변경하고자 함

비 고

결재

★주무관

임재욱

설비설계과장

장재순

설비부장

01/12

김호성