투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	사업시기 조정 알림(응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 귀 사간 계약체결하여 추진중인 『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』에

대하여 공사구간에 접한 노후석축과 인근 노후 건축물에 대한 안전 위해요인 해소를 위해 주변지역 재건축 시기와 연계하여 시행코자 공사시기를 ’24년 상반기 이후로 조정하였음을 알려드리오니 관련 후속조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

※ 공사재개시 사전 통보 예정.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)서영엔지니어링 외 2개사,(주)대명이십일 외 1개사,(주)한국기반관리,(주)화랑이앤씨
주무관	김광호		환경시설과장	오열상		방재시설부장	01/12 이동훈
협조자
시행	방재시설부-408	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	대시민공개