문서번호	시설관리과-674
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
윤진원	김주경	이규희	01/12 김명용
협 조
	급수운영과장		김종원
	주무관		정준석

2022년 노후밸브 정비 추진계획

2022. 1. 12.

강동수도사업소

(시설관리과)

2022년 노후밸브 정비 추진계획

상수도 밸브의 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위하여 노후·고장 밸브를 정비하고자 함

□ 사업개요

○ 추진근거 : 2022년 노후밸브 정비계획 알림(본부 시설관리과-88(2022.1.3.)

○ 사업대상 : 1,474개소 (회주철 밸브, 2022. 1월 기준)

○ 사업목표 : 281개소 (노후밸브 142, 소화전용 노후밸브 139)

○ 사업내용 : 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’95년 이전 회주철 밸브 정비

□ 2021년 추진실적

구분	목표	실적	정비율(%)	비고
계	232	226
노후 밸브	93	109	117.2	목표 초과 달성
소화전용 노후밸브	139	117	84.1	소방비 예산 부족으로 미달성

□ 2022년 추진계획

○ 노후밸브 정비                                  (단위: 개소, 백만원)

구 분		계	급수운영과	시설관리과
목표 수량	계	142	123	19
	350㎜ 이하	131	115	16
	400㎜ 이상	11	8	3
사 업 비		1,091	754	337

○ 소화전용 노후밸브 정비(소방재난본부 관리 대상)

(단위: 개소, 백만원)

구 분	계	급수운영과	시설관리과
목 표 수 량	139	83	56
사 업 비	167	100	67

- 지하식 소화전 밸브실은 적벽돌 쌓기가 생략된 소화전실(축소형) 설치

□ 추진방법

○ 본부 정비 우선순위에 따라 정비

- 고장·누수 밸브, 중블럭단위 일제정비, 대구경(400㎜이상) 우선

○ 소·중블록 단위의 노후밸브 일제 정비 추진

- 재개발·재건축 대상지 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

○ 대구경(400㎜ 이상)밸브 정비

- 고장 및 누수 밸브 우선 정비

- 대규모 단수로 인한 민원 예상지역은 부단수 공법으로 시행

○ 정비방법 : 현장조사 및 도로굴착 협의 → 노후밸브 교체·정비 → 상수도 GIS 입력

○ 예산집행 : 단가계약(시설물 보수 및 설치, 급수공사)에 반영하여 정비

- 소화전용 노후밸브 정비는『소화전 설치․보수』사업의 예산과 구분되므로 분리 집행 (소방재난본부 예산 재배정 받아 집행)

□ 행정사항

○ 과별 소관 노후밸브 정비 추진 (시설관리과 총괄)

○ 노후밸브 정비실적 월보 제출(본부 시설관리과에 다음달 10일까지)

○ ‘소화전용 노후밸브’ 정비실적 분기별 제출(본부 시설관리과에 다음달 10일까지)

붙임  1. 연차별 노후밸브 정비계획 1부.

2. ‘노후밸브 정비’ 실적 제출 양식(월보) 1부.

3. ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출 양식(분기별) 1부.  끝.