코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	성동구청장(치수과장)
(경유)
제목	응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 관련 사업시기 조정 알림

1. 물순환정책과-535호(2022.1.10.)와 관련입니다.

2.『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』관련 공사구간에 접한 노후석축과 유수지 인근 노후 건물에 대한 위험요인 사전제거 및 보강이 필요함에 따라“응봉1구역 주택재건축정비사업”과 연계하여 공사시기를 `24년 상반기 이후로 조정하였음을 알려립니다.

3. 아울러, 응봉1구역 주택재건축정비사업 사업시행계획 인가신청에 따른 협의 시 정비사업 구역(도로 포함)이 유수지와 접함에 따라『유수지내 노후 석축에 대한 보강조치(옹벽)』에 대한 조건을 부여하여 주시기 바랍니다.

붙임  응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 사업시기 조정 검토보고 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최용석		물순환시설팀장	이재학		물순환정책과장	01/13 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-812	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	kr101092@seoul.go.kr	/	부분공개(5)