문서번호	설비부-659
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김현기	01/14 김호성

『서울시네마테크 건립 기계공사』

지열시스템 변경(정산) 검토보고

2022. 1.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 기계공사」

지열시스템 변경(정산) 검토보고

「서울시네마테크 건립 기계공사」관급자재 지열시스템 관련, 납품처리 전 정산처리하고자 검토보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 기계공사

□ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

□ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806.11㎡

□ 공사기간 : 총차 ’20.2.14.~’22.12.10.(1차  ’20.2.14.~’22.3.31.)

□ 공사금액 : 총차 금1,831,415,000원(1차 금54,020,000원)

□ 도 급 사 : 세진건설주식회사

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 근정

2		관련근거

□ ‘서울 시네마테크 건립 기계공사 지열시스템 구매’ 정산처리 요청 검토보고

- 근정시네 제2022-024호(2022.1.11.)

3		검토내용

□ 계약현황

구분		계약금액	납품기한	계약자
지열시스템	1차	************	**********	****
	총차	************	**********

□ 변경사유

- 보험료, 산업안보건관리비 등 사후정산 항목에 대하여 납품 전 정산처리

□ 변경내용

구분	당초	변경	증·감
1차	***********	***********	**********
총차	***********	***********	**********

※ 공사기간은 변경없음

□ 정산내역

- 1차

구분	당초	변경	증·감	비고
건강보험료	*********	*	**********
연금보험료	*********	*	**********
노인장기요양보험료	******	*	*******
산업안전보건관리비	*********	*******	**********
소계	*********	*******	**********
부가가치세	*******	******	********
합계	*********	*******	**********	원단위절사

- 총차

구분	당초	변경	증·감
건강보험료	*********	*******	**********
연금보험료	*********	*******	**********
노인장기요양보험료	*******	******	*******
산업안전보건관리비	*********	*********	**********
소계	*********	*********	**********
부가가치세	*******	*******	********
합계	*********	*********	**********	원단위절사

□ 건설사업관리기술자 의견

- 계약업체(제이앤지)에서 제출한 정산처리 요청 서류를 검토한 결과 보험료 등사후정산 항목에 대하여 적정하게 정산된 것으로 판단됨

4		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 정산처리하는 것이 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.