실정보고 검토서

공사명

창동상계 연결교량(보행교) 건설공사

공사개요

· 위 치 : 창동교~상계교

· 규 모 : 보행교 건설, L=1.1km

· 공사기간 : ‘21.04.~‘24.04.

· 도 급 비 : 10,529백만원

· 시공사 : 청광건설㈜

· 감리단 : ㈜동해종합기술공사

· 설계사 : ㈜동해종합기술공사

실정보고 건명

임시우회로 및 공사용 진입로 설치 실정보고

실정보고

사유

***********************************

***************************************

**************************************

*************************

*****************************************

***********************************

건설사업관리단

검토의견

- 안전 및 유지관리 기관인 노원구청 의견을 반영하여 우회로

및 진입로 설치가 타당함

변경(안)

****	******	******
********	*	******
****************	*	******
*****	*	*******
*******		*********

예산조치 계획

당초 사업비 내 시행가능(설계도서 검토사항에 따른 증액조치)

발주처

검토의견

- 우회도로 및 장비진입로 설치 건설사업관리단의 검토의견이

타당하여 승인 조치하고 추후 계약내역에 반영하고자 함.

결재

담당

노순재

과장

황윤기

부장

01/14

하현석