실정보고 검토서

공사명

창동상계 연결교량(보차도교) 건설공사

공사개요

· 위 치 : 창동교~상계교

· 규 모 : 보차도교 건설, L=1.7km

· 공사기간 : ‘21.04.~‘24.04.

· 도 급 비 : 13,425백만원

· 시공사 : 하웅종합건설㈜

· 감리단 : ㈜동해종합기설공사

· 설계사 : ㈜동해종합기술공사

실정보고 건명

가도 및 임시 우회로 가배수로공 수량변경

실정보고

사유

****************************************

*************************

*********************************

*********************************

*********************************

건설사업관리단

검토의견

- 이상기후로 인한 호우피해 예방을 위하여 가배수관 용량을

을 증가하여 우회로 이용자 및 공사장 안전을 확보

변경(안)

****	**	**********	******
***********	****** *******	****** ********	******
************	**** *****	****** *********	*******
*****	*******	*******	*******
*******	*******	*******	*********

예산조치 계획

당초 사업비 내 시행가능(설계도서 검토사항에 따른 증액조치)

발주처

검토의견

- 안전사고 예방을 위한 가배수관 설치 관련건설사업관리단의

검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 계약내역에

반영하고자 함.

결재

담당

노순재

과장

황윤기

부장

01/14

하현석