문서번호	급수운영과-1126
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	중부수도사업소장
서영인		代박장진	01/17 박동석
협 조	시설관리과장			김상웅
	급수운영팀장			박장진
	기전팀장			양경현
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			성영한

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

『2022년 중구, 용산구 관내』

상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

2022. 1.

중부수도사업소

(급수운영과)

『2022년 중구, 용산구 관내』

상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

2022년 서울시 중구, 용산구 관내 누수, 수질사고로 인한 비상상황에 대비한 블록시스템 공급체계를 구축하고자 아래와 같이 계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

○ 2040 서울시 수도정비기본계획(‘21.12.7 환경부 승인)

○ 무단수 급수체계 구축사업 추진계획(배수과-4140, ‘17.5.18)

○ 2022년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획(배수과-226, ‘22.1.7)

Ⅱ		2022년 추진계획

□ 추진개요

○ 정비목표 : 유량계 설치 ****

○ 총사업비 : ******

○ 사업내용

********************************

○ 추진개요

(단위:백만원)

구분		계	용산구	중구
유량계설치	설치개소	*	*	*
	사업비	***	***	***

□ 세부 추진계획

○ 유량계 설치 : 단가계약 / ****************

공 사 명		공 사 위 치	구경 (㎜)	사업비 (백만원)	사업기간
유량계 설치	용산구 관내 상수도공사	***********	***	**	‘22.3~6
		***********	***	**
		***********	***	**
	중구 관내 상수도공사
		*************	***	**
		***********	***	**
		************	***	**

○ 추진일정

연 번	추 진 계 획	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1	현장조사 및 설계
2	도로굴착 승인
3	관급자재 구매
4	공사착공(시행)
5	공사준공

※ 유량계실 및 관로공사는 지역담당팀, 유량계 설치는 기전팀 시행

Ⅲ		행 정 사 항

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

사전절차 이행 등 단계별 관리를 통한 사업 조기완료 추진

도로굴착 협의 및 유관기관 협의 등 병행 추진

○ 중대재해 처벌법 관련 안전관리 강화 추진

자재, 품질, 안전 등 공사장 관리실태 자체 수시 점검 실시

○ 추진실적 보고 : 본부 배수과 매월 5일.  끝.