코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	파주운정3지구 광역교통개선대책(제2자유로 종점부 입체화) 변경촉구

1. 도로계획과-10778호(2021.8.12.)와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진 중인「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화」사업 관련, 당초 `21년 10월로 예정되어있던 파주운정3지구 광역교통개선대책 변경절차 이행지연으로 구룡사거리 구간의 사업 추진이 불가한 상황입니다.

3. 현재 파주운정지구 입주가 진행되고 있어 구룡사거리 교통량이 늘고 있으나, 행정절차 지연으로 인한 사업 지체로 교통정체가 심화되고 있어, 조기 사업시행을 요구하는 민원이 지속적으로 발생하고 있습니다.

4. 경기도와 한국토지주택공사에서는 파주운정3지구 택지개발사업의 교통개선대책사업이 원활이 추진될 수 있도록 조속히 광역교통개선대책 변경(안) 절차를 진행하여 주시기 바라며, 향후 추진계획(일정)을 2022.01.21.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	경기도지사(광역교통정책과장),한국토지주택공사 사장(신도시사업2처)
주무관	김현상		광역도로계획팀장	황원근		도로계획과장	전결 01/17 임창수
협조자
시행	도로계획과-736	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8084	/전송	02-2133-0763	/	kimhs881@seoul.go.kr	/	대시민공개