문서번호	동물보호과-1052
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동물복지시설관리팀장	동물보호과장
이종명		강경숙	01/17 이미경
협조

양재시민의 숲 반려견놀이터 조성을 위한

기본 및 실시 설계 용역 추진 계획

2022. 1.

동물보호과

-양재시민의숲 반려견놀이터 조성을 위한-

기본 및 실시 설계 용역 추진 계획

양재시민의 숲 반려견 놀이터 조성 추진을 위한 설계 용역을 실시하여

동물복지 분야 시장 공약사항 이행에 만전을 기하고자 함

1		추진 경위

□ 추진배경

○ 시장 공약사항(3-3-3) : 반려동물과 함께 지내는 환경지원

- 반려견 놀이터 연차별 확충  ※‘22년 조성 목표: 3개소 (시1, 자치구2)

○ 시 공원內 반려견 놀이터 조성추진***********************

□ 관련법령

○ 근거법령 : 공원녹지법 시행규칙 제11조

- 반려견놀이터(동물놀이터) : 10만제곱미터 이상 도시근린공원내 설치

○ 추진절차 : 도시공원 조성 변경 심의, 주민의견청취, 공람공고 등

□ 검토경위

○ 관련 부서 협의

- ‘21.11~12월초 : 푸도국 관련 부서 소통 협의, 추진 절차 및 대상공원 파악

- ‘21.12.15      : 동부사업소 방문협의(공원부지 및 공원변경심의 협조요청)

- ‘21.12.16~17 : 양재시민의 숲, 서울 숲 현장 조사(공원내 대상지 검토)

- ‘21.12.22~24 : 대상지 결정(양재시민의 숲) 및 추진경과 보고(관계부서)

○ 주민 의견 조사

- 조사기간 : ‘22. 1. 7 ~ 1. 10. (4일간)

- 설문대상 : 양재시민의숲 이용 시민 331명 (반려인 123, 비반려인 208)

- 설문내용 : 양재시민의 숲 내 반려견놀이터 조성에 대한 긍정/부정

- 조사결과 : 전체 응답자의 83%(331명 중 277명)가 긍정 답변,

반려견을 키우지 않는 응답자의 74%가 긍정적임 (208명 중 154명)

2		세부 추진 계획

□ 대상부지 : 양재시민의 숲 공원 (관리부서 : 동부공원녹지사업소)

□ 조성내용

○ 규모 : 약 750㎡

○ 시설 : 대형견․중소형견 놀이터, 휀스(1.2~1.5m), 출입문 등

공원내 위치도	놀이터 부지 현장
시설물 예시(내부)	시설물 예시(출입문)

□ 용역내용 : 기본 및 실시설계, 인허가 처리(공원조성 변경 심의)

□ 추진방법 : 1인견적 수의계약

□ 용역금액 : *******

○ 산출조사

업체명 항목	*****	*****
설계용역 (기본 및 실시)	*********** ****************	************ ************
공사비	************	************
조성비 합계	************	************

※ 기존 놀이터 조성비 : 80백만원(14년 월드컵공원), 112백원(16년 보라매공원)

※ 설계용역비 산정 기준 : 엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부고시 2021-137호)

○ 예산과목 : 시민건강국 동물보호과, 선진형 동물보호시스템 구축, 동물보호 및 복지수준 향상, 반려견 놀이터 조성(전환사업), 시설비

3		향후 추진사항

□ 추진일정

구분	추진기간	추진내용
****	************	*********
*******	***********	*********
******	*******	*************
**********	****************	*********
******************	**********	**********
******	********	*********
*********	********	****************

□ 관련 부서간 협의 추진

○ 공원심의 : 공원조성과, 공원녹지정책과, 동부공원녹지사업소

○ 세부 설계검토 : 동부공원녹지사업소

붙임 : 과업지시서(안) 및 견적서 2부.  끝.