투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	문화비축기지관리사무소장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(문화비축기지 매점 신축공사)

1. 문화비축기지관리사무소-7375(2021. 12. 30.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약기간 내     공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 문화비축기지 매점 신축공사(건축,기계)

나. 계 약 자

******************************

*******************************

************************************

라. 공사기간: 2021. 10. 4.~ 2022. 3. 2.

마. 변경내용: 준공기한 변경

○ 당초: 2022. 3. 2. → 변경: 2022. 6. 10.

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		재무팀장	양근대		공원운영과장	01/17 류기혁
협조자
시행	공원운영과-617	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)