문서번호	건축부-877
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		정채문	01/17 신명승
협 조

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

설계의도구현용역 기간연장 검토보고

2022. 01.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

설계의도구현용역 기간연장 검토보고

『시립마포실버케어센터 건립공사 설계의도구현용역』과 관련하여 장기2차계약 기간연장을 검토하고 보고드림

-**************************

-***********************************

1		용 역 개 요

○ 용 역 명: 시립마포실버케어센터 건립공사 설계의도구현용역

○ 용 역 사: ㈜에이텍종합건축사사무소(대표: 김상길)

○ 용역금액: ********************************************

○ 용역기간: 2020.11.18.~2022.01.17.

(1차:`20.11.18~`21.4.17, 2차:`21.4.18~`22.1.17)

○ 과업내용: 설계도서의 해석 및 의도 전달 등

2		추 진 경 위

○ 2020.11.17. : 총차 및 1차수 용역계약

○ 2020.11.18. : 1차수 용역착수

○ 2021. 4.16. : 1차수 용역완료

○ 2021. 4.18. : 2차수 용역계약 및 착수

3		계약변경 검토

○ 관련근거

- 에이텍2022-7(`22.1.12) “설계의도구현용역 기한연장 요청”

- 지방자치단체 용역계약 일반조건 제8절 2. 계약기간의 연장

○ 용역기간 변경내용

구분	변 경 전	변 경 후	증·감	비고
**	*********************	*********************	*****	**** **
**	*****************	******************	*****

○ 변경사유

- 공사준공기간(`22.3.14)에 맞추어 용역기한 연장

○ 지체상금: 미부과

4		처 리 의 견

○ 공사준공기한(`22.3.14)에 맞추어 용역 기한을 연장하고자 함

붙 임: 설계의도구현용역 기간연장 요청서류 1부. 끝.