문서번호	방재시설부-658
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	치수시설과장	방재시설부장
송민섭	손창익	01/18 이동훈
협 조
	주무관		김규희
	주무관		지상범
	주무관		이병환

- 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 -

부분준공(1~3차)사항 사업주관부서 보고

2022. 1.

도시기반시설본부

[방재시설부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 -

부분준공(1~3차)사항 사업주관부서 보고

중랑천 마스터플랜 단기사업 일환으로 시행 중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」의 부분준공(1~3차)사항을 본청 사업주관부서(하천관리과) 보고코자 함.

▢ 공사개요

○ 위    치 : 중랑천 한강합류부 ~ 군자교 (L=4.9km, 양안 9.8km)

○ 공사규모

- 한강·청계천 합류부 개선, 제방호안 완경사 정비, 친수문화공간 조성

- 보행교량(강관거더교 L=210m, B=3.5m), 자전거도로(L=4,314km, B=4m) 설치 등

○ 공사기간 : 2019. 5. 27. ~ 2022. 8. 9.

○ 총사업비 : 31,114백만원(도급비 19,204백만원)

○ 시공사 / 감리사 : (유)동경건설외 2개사 / ㈜천일 외 2개사

▢ 추진현황

○ `13.11.02. : 시장님 중랑천 녹색브랜드화 사업 관련 투어 시 중랑천 장기 관리계획 등 추진요청

○ `14.09.~`16.06. : 중랑천 마스터플랜 용역시행(하천관리과)

○ `16.07.~`18.08. : 중랑천 생태회복 및 친수문화조성 기본 및 실시설계 시행(하천관리과)

○ `18.09.17. : 공사발주 의뢰(하천관리과→도기본)

○ `18.11.15. : 공사발주

○ `19.05.23. : 건설공사 계약

○ `19.08.26. : 하천점용허가(서울지방국토관리청), 공사착공(5.27~8.25 : 점용허가협의로 공사연기)

○ `20.05.15. : 1차공사 준공(준공검사 : `20.05.18)

○ `20.11.27. : 2차공사 준공(준공검사 : `20.11.30)

○ `21.06.17. : 3차공사 준공(준공검사 : `21.06.21)

▢ 예산 및 준공 시설물 현황(1~3차)

○ 부분준공 예산현황

- 토목, 조경

(단위 : 원)

구분 (계약기간)		1차 (2019.05.27.~ 2020.06.20.)	2차 (2020.04.03.~ 2020.12.31.)	3차 (2021.01.19.~ 2021.07.18.)	계
준공일		2020.05.15.	2020.11.27.	2021.06.17.
준공검사일		2020.05.18.	2020.11.30.	2021.06.21.
계약금액		2,811,000,000	3,440,943,000	1,487,519,000	7,739,462,000
	토목	2,596,700,000	3,088,998,000	1,083,049,000	6,768,747,000
	조경	214,300,000	351,945,000	404,470,000	970,715,000

- 전기

(단위 : 원)

계약구분	계약기간	준공일	준공검사일	계약금액
1차	2020.02.28.~ 2020.12.31.	2020.12.03.	2020.12.04.	129,876,840

○ 부분준공 시설물 주요현황

- 토목

구분	규격	단위	수량	비고
식생매트	GG-361R2, 인장력 강화형	㎡	45,719	송정1,2,3지구
사석부설	30KG 이상	㎥	4,288	송정1,3지구
보행교	강관거더교, B=3.5m, L=210m	개소	1	송정1지구~도류제1지구
신설보도교	강관거더교, B=2.5m, L=33.5m	개소	1	송정1지구~송정3지구
군자1낙차공(개선)	스톤네트(호박돌400형)	㎡	2,930	군자1낙차공
배수구조물	U형 플륨관 : 500×500×2000	m	901	송정1,3지구
	집수정 : 600×600×950	EA	9	송정1,3지구
자전거도로	아스콘(T=5cm), 콘크리트(T=15cm)	㎡	4,569	송정1,3지구

- 조경

구분	규격	단위	수량	비고
매화나무	H3.5×R12	주	81	송정지구
왕벚나무(이식목)	R20 이상	주	196	송정지구 (고수호안 사면)
관목류	조팝나무 등 4종	주	32,640	송정지구
초화류	갈대 등 4종	본	154,600	송정지구
산책로	거친솔마감 콘크리트 포장	㎡	4,047	송정지구
평의자	1600×480×430	개소	14	송정지구

- 전기

구분	규격	단위	수량	비고
가로등기구	75W(7M)-이설	EA	37	송정지구
	75W(7M)-신설	EA	10	송정지구
	50W(5M)-신설	EA	5	송정지구
가로등분전반	6회로	EA	3	송정지구
스텝등기구	LED 9W/220V	EA	52	보행교

▢ 행정사항

○ `22. 01. : 부분준공(1차~3차) 완료보고(본부 → 하천관리과)

부분준공(1~3차)건 하자보증서 발급 후 하천관리과 제출

붙임 : 부분준공 사진 및 시설물 목록 각 1부.  끝.