문서번호	도시철도설비부-688
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
김태연		김이곤	01/20 김중영
협 조

『별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사』

공정예정표 변경 검토 보고

2022. 1.

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사』

공정예정표 변경 검토보고

선행공정 지연으로 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사 지연이 발생하여 선행공정 추진에 맞추어 예정공정표를 조정하고자 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		계 약 개 요

**********공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사

**********시 공 사 : ㈜디지팍스 대표 정병국, ㈜창흥텔레콤 대표 진경미

**********계약금액 : 금3,919,218,360원

**********공사기간 : 2021.5.21. ~ 2024.1.23.

**********감 리 사(통신분야) : 문엔지니어링(주)

Ⅱ		공정예정표 변경 요청

**********공정현황(2021.12.31. 기준)

구분	계획	실적	대비	비고
공정율(%)	12.90	11.58(-1.32)	89.76(-10.24)

※ 3공구 토목공사 공정[공정율: 실적(60.3%)/계획(100%)]

**********변경요청 사유

- 선행공정 지연으로 정보통신 공정 지연 발생

- 계획대비 본선터널(케이블트레이), BN3 정거장(지상)[케이블트레이, 배관]설치 하지 못함

Ⅲ		감리원 검토의견

**********현재 선행공정 추진 상태로 조속한 통신공사 추진은 어려움이 있음

**********선행공정에 맞춰 정보통신공사 예정공정표를 수정하여 공사 추진하는 것이 타당함

Ⅳ		검 토 의 견

**********변경요청한 공정예정표 승인처리

- 선행공정인 제3공구 토목공사 공정 지연으로 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사 예정공정표를 변경하여 추진하는 것이 타당함

붙임 : 감리원 검토보고 및 공정예정표(변경전․후) 각1부.  끝.