문서번호	물재생계획과-994
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김재윤	이웅희	박홍봉		01/21 한유석
협 조
	하수설계정보팀장		代곽인복
	하수계획팀장		노승원

소구역 하수관로 정비 기술용역 추진계획

2022.  1.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	2030 하수도정비 기본계획
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

소구역 하수관로 정비 기술용역 추진계획

서울시에서 추진하는「천호-1 소구역 등 4개 지역」설계용역에 대한 발주방안(입찰방법 및 시행방법 등) 검토 보고 임

1		추진근거

○ 2022년 소구역 하수관로 정비 추진계획(‘21.8.)

- 신월1-4 소구역 등 11개 지역에 대한 신규 설계용역 시행

○ ‘22년 소구역 하수관로 정비 설계용역 추진계획(’22.1.)

- ************************************************

2		용역개요

○ 용역현황                                     (단위:㎞, 백만원)

연번	소구역명	정비규모	공 사 비	설계용역비		비 고
				전 체	‘22년
합 계		****	*******	*****	*****
1	****	****	******	*****	*****	*****
2	*****	****	******	*****	***	*
3	*****	****	******	*****	***	*****
4	*****	****	******	*****	***	*******

**********************************************

○ 주요내용

- 하수관로 기능회복 및 구조적 상태 개선을 위한 소구역별 하수관로 정비계획 수립

- 유량 및 수질 모니터링 제어시스템 구축

- 차집시스템 개선으로 방류수역 수질 개선

- 하수관로 시공품질 개선 및 품질관리 방안 마련

3		추진사항

○ ’21. 8. 24.  : ‘22년 소구역 실시설계용역 계획 수립 방침

○ ’21. 9.   6.  : 기술용역 타당성 심사(심사결과 : 적정)

○ ’22. 1.   6.  : 설계용역 추진계획 수립(市 추진 설계용역 선정)

○ ’22. 1. 14.  : 용역 발주심의 의뢰(물재생계획과→기술심사담당관)

4		시행계획

○ 관련근거(사업수행능력평가 및 낙찰자 결정)

-「건설기술진흥법」제35조 및 같은법 시행령 제52조

-「지방자치단체 입찰시 낙찰자 선정기준」(행정안전부 예규 제198호, ‘22.1.7.)

○ 추진방법 : 건설기술용역

○ 입찰방법 : 일반입찰(장기계속계약)

○ 시행방법(낙찰자결정) : *****************

- *****************************************************************************

◈ 적격자 및 낙찰자 결정기준

○ 사업수행능력평가 결과 90점 이상을 얻은 자로서 입찰참가 자격을 갖춘 자

- 단, 수행실적 평가서 제출업체가 15인 미만인 경우, 모든 업체에게 입찰참가자격을 부여하되 수행실적 평가점수가 60점 이상인자로 한하고,

- 수행실적 평가점수가 90점 이상인 자가 15인 미만인 경우에도 수행실적 평가점수가 60점 이상인 자 중 득점 순으로 15위까지 입찰에 참여할 수 있는 자격 부여

○ 낙찰자 결정은 적격업체에 한하여 가격입찰을 실시하고 예정가격 이하로서

최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 92점 이상인 자를

낙찰자로 선정

‣ 수행능력평가(PQ):참여기술인(50점)+용역수행실적(15점)+신용도(10)+기술개발및투자(15)+업무중복(10)

‣ 적격심사 평가기준(100점):용역수행능력(65점)+지역업체(3점)+경영상태(2점)+입찰가격(30점)

○ 입찰참가자격(안)

- 「*************************************************************************************************************************

- *****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- ***********************************************************************************************************

5		향후계획

○ ’22. 1.~2.        : 기술용역 발주 전 사전절차 추진

- 사전규격공고, 사업수행능력 세부평가기준, 일상감사, 계약심의위원회

○ ’22. 3.~4.        : 용역 발주 및 착수

○ ’22. 4.~‘23. 12.  : 용역 시행 및 준공

붙  임  : 1. 설계내역서 각 1부.

2. 과업내용서 각 1부.

3. 사업수행능력 평가서 작성기준 및 세부평가기준 각 1부.  끝.